주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151224	작성자	박철희	작성일	2015/12/24	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	34.0/50.0	33.6/40.0	7.6/10.0	75.2/100.0
		실적	30.2/50.0	34.4/40.0	7.6/10.0	72.2/100.0

주요 내용	1. 통계정보 개선 개발 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 검수 의뢰
업무구분	금 주 실 적 (2015.12.21 ~ 2015.12.24)	차 주 계 획 (2015.12.28 ~ 2015.12.31)
사업관리	1. SSL(Secure Socket Layer)프로토콜 반영을 위한 인증서 선정 - CA(Certificate Authority) 인증 신청 협의
시스템개발	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경 - 통계정보 개선 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 7page 누적 : 37page CSS Validation : 총 54page 완료 3. 2015년 촬영 항공사진 서비스 설정(개발장비) - 국가정보원 보안심의 검사 의뢰	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 통계기능 정보 개선 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 51매 수행) 누적 : 921 매 완료 - 국가정보원 검사 의뢰	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국가정보원 보안지역 분석 및 검토
이슈사항