주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151231	작성자	박철희	작성일	2015/12/31	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	36.2/50.0	33.6/40.0	7.9/10.0	77.7/100.0
		실적	33.2/50.0	34.4/40.0	7.9/10.0	75.5/100.0

주요 내용	1. 통계정보 개선 개발 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 3. 항공사진 국군기무사 보안지역 분석
업무구분	금 주 실 적 (2015.12.28 ~ 2015.12.31)	차 주 계 획 (2016.01.04 ~ 2016.01.08)
사업관리
시스템개발	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 통계기능 정보 개선 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 13page 누적 : 50page CSS Validation : 총 54page 완료	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 테스트 계획수립 2. 웹 접근성 인증 - 웹접근성 인증 기관 의뢰 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 국정원 보안 지역 분석 - 총 : 4,969매 중 584매	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국가정보원 보안지역 보안처리
이슈사항