주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R160108	작성자	박철희	작성일	2016/01/08	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	38.1/50.0	35.6/40.0	8.3/10.0	82.0/100.0
		실적	35.4/50.0	35.6/40.0	8.3/10.0	79.3/100.0

주요 내용	1. 시민서비스 기초구역 개발 작용 및 테스트 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 완료 3. 항공사진 국군기무사 보안지역 분석 및 구축
업무구분	금 주 실 적 (2016.01.04 ~ 2016.01.08)	차 주 계 획 (2016.01.11 ~ 2016.01.15)
사업관리		완료보고회 일정 협의
시스템개발	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 통계기능 정보 개선 개발(계속) - 시민서비스 기초구역 개발 적용 및 테스트 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 4page 누적 : 54page 완료 CSS Validation : 총 54page 완료	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 테스트 계획수립 2. 웹 접근성 인증 - 웹접근성 인증 기관 의뢰 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 국정원 보안 지역 분석 - 총 : 4,969매 중 488매 (재분석 결과) - 국가정보원 보안지역 처리 총 : 488매 중 280매 완료	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국가정보원 보안지역 보안처리 2. 좌표이동 DB 자료 이관 - 인트라넷(정사영상지도, 구별영상지도) - 2015년 촬영 자료
이슈사항