주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R160115	작성자	박철희	작성일	2016/01/15	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	43.25/50.0	36.8/40.0	8.6/10.0	88.7/100.0
		실적	41.70/50.0	36.3/40.0	8.6/10.0	86.6/100.0

주요 내용	1. 시민서비스 기초구역 개발 적용 및 테스트 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 완료 3. 항공사진 국군기무사 보안지역 분석 및 구축
업무구분	금 주 실 적 (2016.01.11 ~ 2016.01.15)	차 주 계 획 (2016.01.18 ~ 2016.01.22)
사업관리	완료보고회 일정협의	완료보고회 일시 : 2016년 1월 18일(월요일) 오후 2시 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층)
시스템개발	1. 시스템 구현 - 표출 속도 향상을 위한 알고리즘 변경(계속) - 테스트 계획수립 2. 웹 접근성 인증 - 웹접근성 인증 기관 의뢰(서면 심사 접수) 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트	1. 시스템 구현 - 통계정보 생서 변경 적용 - 단위 테스트 및 안정화 2. 웹 접근성 인증 - 웹접근성 인증 기관 의뢰 3. SSL 통신을 위한 CA 인증 적용 - https 프로토콜 통신(본인확인)을 위한 CA 인증 테스트 - Web Application(JEUS) 설정 지원 및 확인
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 국정원 보안 지역 분석 - 총 : 4,969매 중 477매 (재분석 결과) - 국가정보원 보안지역 처리 총 : 477매 중 197매 완료 2. DB 자료 이관 - 2015년도 촬영 데이터(인트라넷)	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국가정보원 보안지역 보안처리 검수 의뢰 2. 좌표이동 DB 자료 이관 - 인트라넷(정사영상지도, 구별영상지도) - 2015년 촬영 자료(계속)
이슈사항