2015년 공단 감독 위탁공사 현황 및 설문서

□ 2015년 공사감독 위탁 현황                           (단위 :백만원)

연번	분야	공사명	총공사비	공사기간	발주부서	비고
1	토 목	자하문터널 보수공사(2차)	800	‘15.04.17∼12.15	북부도로사업소 (시설보수과)
2	토 목	북악터널 내부보수보강공사(2차)	1,739	‘15.04.01∼12.24	북부도로사업소 (시설보수과)

□ 현행 공단 감독 위탁에 대한 문제점 및 개선방안(건의)

공 사 명	현황 및 문제점	개선방안	비고
자하문터널 보수공사 및 북악터널 내부 보수·보강공사	- 공사감독 현장 상주가 이행되지 않아 공사관리 및 품질관리 차질 우려 예상	- 현재 1인당 공사감독 건수가 3~4건으로 현장상주가 불가하므로, 2건내/1인당 공사감독 쳬계로 개선
	- 경직된 업무처리와 적극적인 문제해결 노력 부족으로 공사추진 및 업무 효율성 저해	- 경험이 풍부하고 소속감 및 책임감이 있는 정규직으로 조정이 필요
	- 공사착수 전 사전협의 및 공사 진행 중 수시보고 부족으로 원활한 공사추진 곤란	공사 착수전 설계서 및 현장 검토 후 누락, 오류, 상이 등 미비사항은 사전협의 공사 중 월 2회 이상 추진사항 통보 및 문제 발생 시 수시통보

* 현장관리 :  현장관리 적정,  현장상주 평균시간, 주요공종 입회․확인 이행여부 등

* 행정처리 :  실정보고, 설계변경 등  공종별 각종 검토보고 이행 여부

* 공단감독 : 분야별 감독자 전문성 및 감독배정 적정, 발주청 지시사항 이행 여부 등