2015년 공단 감독 위탁공사 현황 및 설문서

□ 2015년 공사감독 위탁 현황                      (단위 :백만원)

연번	분야	공사명	총공사비	공사기간	발주부서	비고
1	토 목	서교동 343-10번지외 2개소 배급수관 정비공사	1,100	‘15.4.28 ~ 10.25	서부수도사업소 (급수운영과)
2	토 목	녹번동 117번지외 2개소 배급수관 정비공사	800	‘15.4.28 ~ 10.24	서부수도사업소 (시설관리과)
3	토 목	불광동 308번지외 5개소 배급수관 정비공사	1,100	‘15.5.08 ~ 11.03	서부수도사업소 (시설관리과)
4	토 목	응암역 ~ 와산교간 송배수관 정비공사	2,136	‘14.12.08 ~ 10.12	서부수도사업소 (시설관리과)

□ 현행 공단 감독 위탁에 대한 문제점 및 개선방안(건의)

공 사 명	현황 및 문제점	개선방안	비고
서교동 343-10번지외 2개소 배급수관 정비공사	- 공단감독이 여러건의 공사감독시 특히 주.야간공사 동시 감독시 현장상주 등 문제발생.	-인원 충원 및 적절한 업무 분장
녹번동 117번지외 2개소 배급수관 정비공사	-예전보다 현장상주 감독업무 수행에 많은 시간을 시행하나 아직도 감독업무를 1인 여러건을 수행하고 있음	-1인 한건만 감독업무를 시행함으로서 양질의 시공 감독을 수행 하였으면 함
불광동 308번지외 5개소 배급수관 정비공사	-잦은 인사이동으로 인한 업무 연속성 결여	-공사감독 수행중 인사이동 지양
응암역~와산교간 송배수관정 비공사	-비굴착 갱생공사에 대한 전문지식 미흡	-비굴착 갱생에 대한 전문지식 습득후 공사감독업무 수행

* 현장관리 :  현장관리 적정,  현장상주 평균시간, 주요공종 입회․확인 이행여부 등

* 행정처리 :  실정보고, 설계변경 등  공종별 각종 검토보고 이행 여부

* 공단감독 : 분야별 감독자 전문성 및 감독배정 적정, 발주청 지시사항 이행 여부 등