문서번호	도로보수과-6106
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	06/22 임대성
협조
	주무관		이상하

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제1차)

2015.  6. 22(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사규모

- 노면표시 도색   L= 23,695m

- 노면표시 재도색 L=168,852m

- 노면표시 제거   L=   8,055m

- 도로표지병 설치 N=     184개

- 도로표지병 철거 N=     162개

○ 계약기간 : 2015. 03. 03 ~ 2015. 12. 31

○ 시 공 사 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배

○ 총공사비 : 687,341,520원(관급자재 포함)

□ 설계변경 사유

○ `15년도 자전거 이용시설 정비대상 선정 및 사업비 배정 알림(보행자전거과-3114, 2015.03.12) - 499,560천원

- 청계천로 자전거 우선도로 설치 및 월드컵북로 외 3개 노선 자전거 전용차로 정비관련 교통개선사업으로 긴급히 공사를 완료하여 안전한 자전거 이용환경을 조성하고자 기 시행중에 있는 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	687,341,520	779,317,000	증) 91,975,480
도 급 비	359,018,200	446,352,730	증) 87,334,530
관급자재비	328,323,320	332,964,270	증) 4,640,950

○ 주요공정 및 수량 변경내역

공 정 명	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시 도색	m	23,695	29,200	증) 5,505
노면표시 재도색	m	168,852	190,148	증) 21,296
노면표시 제거	m	8,055	8,770	증) 715
도로표지병 설치	개	184	524	증) 340
도로표지병 철거	개	162	162	-
열부착테이프 설치	개소	0	188	증) 188

○ 예산별 집행내역

(단위 : 원)

공 사 명	예산현액 (배정액)	발주 집행액		잔 액	비 고
		도급비	관급자재
노면표지선 도색 및 제거	720,000,000	687,341,520		32,658,480	하반기 잔액 집행
		359,018,200	328,323,320
자전거도로 유지보수	499,247,000	91,975,480		407,271,520	교통부속물 등 집행
		87,334,530	4,640,950

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 노면표지선 도색 및 제거, 시설비 (687,341,520원)

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 (91,975,480원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 붙임 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 변경 설계내역서(제1차) 1부.  끝.