아동시설 기능보강

사 업 계 획 서

1. 사 업 명

□ 사업구분 : 증개축

□ 대상 시설 : 성애원

□ 대상 건물 : 성애원 숙사동

2. 사업목적

□ 아동들의 인권을 보호하고 꿈과 희망을 키울 수 있는 편안하고 안전한 가정환경을 조성하기 위함.

□ 누수가 잦고, 내부에 습기가 스며들어 벽에 곰팡이가 생겨 안전하고 건강하게 생활해야 하는 우리의 아이들이 위험에 노출되는 상황으로 빠른 시일 내에 증개축이 이루어져 아동의 안전과 행복을 보장할 수 있는 생활환경조성이 절심함.

□ 건물의 노후화로 인한  벽에 균열이 생기고 누수로 얼룩이 생긴 상황이며 특히  건물 정밀안전진단 결과 B~D등급으로  증개축 필요함.

3. 사업추진경위

□  2013년 3월 (주)다스구조엔지니어링 정밀진단

□  2013년 3월 자체 정밀진단 결과 노후건축물 개보수 필요

□  2014년 9월 성애원 자부담 확보 후 국고보조금 신청 결정

□  2014년 10월 국고보조금 대상 시설 결정

4. 사업내용

□ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 2015.  11.

□ 사업규모 : 아동숙소 외 2층 건물 2개동, 3층 건물 1개동 1,750㎡

□ 예    산

(단위 : 백만)

총 계	국 비	지 방 비	자 부 담
2,272	1,111	1,111	50

□ 사업추진일정

구 분	기 간	목 표	사 업 내 용
1단계	’15. 1월	설계업체 선정 및 설계	설계 견적검토
2단계	’15. 2월	설계 검토 및 국고보조금 신청	설계검토를 통한 사업의 타당성 검증 및 국고보조금 신청서 제출
3단계	’15. 3∼10월	공사입찰 및 착공공사 진행	입찰을 통한 공사업체 선정 및 공사착공
4단계	’15. 11월	공사준공	준공 및 하자검토

5. 사업수행주체 : 사회복지법인 성애원

6. 보조사업 소요경비의 자체부담계획

(단위 : 백만)

자부담액	자부담 내용	자부담 확보 방안
40	설계비 및 감리비	법인 전입금 및 지정 후원금
10	증개축 공사 비용	법인 전입금 및 지정 후원금

7. 사업의 효과

-  깨끗하고 안전한 환경 제공

증개축을 통해 아동의 사생활을 보호받을 수 있도록 편안한 공간 구성으로 집단생     활에서 오는 스트레스를 최소화 할 수 있음.

- 아동의 발달단계에 맞는 육아의 필요한 환경구성

영아를 보육하기에 미흡한 공간구성으로 안전적이고 위생적인 환경구성이 절실한 상황으로 아동      의 발달단계에 맞는 서비스를 제공하기 위해 증개축이 꼭 필요함.

- 심리적 · 정서적 안정에 긍정적 영향

증개축을 통해 일반 가정과 근접한 환경을 제공하여 다른 아동들의 환경과 비교하여도 전혀 심리     적으로 위축되지 않도록 하며 시설에 대한 인식을 제고하여 분리된 개인공간을 통하여 사생활을      보호하도록 함.

_ 건물의 안전성 확보

증개축을 통해 건물 노후화로 인한 균열과 누수로 인한 누전 등의 위험요소를 해소함.

스프링쿨러 설치공사를 통해 재난을 예방함.

예상 문제점	대 책	비 고
증개축으로 인한 아동 주거 문제	⦁기존 건물은 아동숙소 증개축 완공 이 후 철거 예정으로 아동들이 주거 하는 데 불편함이 없을 것으로 봄. ⦁아동숙소 외 증개축 부지에 운동장내 2층 건물 2개동, 3층 건물 1개동을 증 개축으로 계획하고 있음. ⦁기존 아동숙소는 증개측 완공 이후 법인 이사회 의결을 거처 처리 하도록 하겠음.
공사 시 분진과 소음으로 인한 민원 문제	⦁분진예방을 위해 건물철거 시 계속 물을 뿌려 주도록 하며 수시로 물청소를 할 것임. ⦁소음 문제는 가능하면 낮 동안 할 수 있도록 하여 민원이 발생하지 않도록 함. ⦁공사 2개월 전부터 현수막을 설치하여 주민들에게 공사계획을 알려 사전에 양해를 구함.
공사 시 아동 식사문제	⦁기존 건물을 활용하여 아동들의 식사 문제는 없도록 하겠음.
공사 시 아동 생활문제	⦁공사 차량 등 별도의 전입로를 설치하 여 아동들의 안전 및 생활에 불편함이 없도록 하겠음.

8. 예상 문제점과 대책