문서번호	도로보수과-9454
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
협조

2015년 노면표시 예산 재배정에

따른 사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

도로보수과

2015년 노면표시 예산 재배정에 따른 사업추진 계획

노면표시용 주요자재인 도료의 KS 기준이 개정되어 새로 조달에 등록된도료의 성능 검증을 위한 시험시공이 필요함에 따라 금번 추가 배정된 예산을 활용하여 시험시공을 실시코자 계획을 보고드림

관련근거

교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 추가예산 배정 요청

교통운영과-8006(‘15. 08. 21)

2015년 노면표시 예산 재배정 및 시험시공 계획 알림 - 교통운영과-18419(‘15. 09. 22)

노면표지용(KSM 6080) 개정

‘14.12.16 : 노면표지용 도료(KSM 6080) 개정 완료(기술표준원)

‘15. 8.   : 노면표지용 도료(KSM 6080) 조달청 등록

- 등록도료(4종 융착식) : P3(20만회), P4(50만회), P6(200만회), P7(400만회)

* 등급별 내마모도 기준은 자동차바퀴 회전수에 대한 도색부분의 내구성 판단 기준임

현    황

시험시공구간 : 안양천로(신목동역~목동교, 약1.5㎞)

시험시공

시험시공 구간을 개정된 도료기준(P3,P4,P6,P7)에 따라 4개 구간으로 나누어

시공(재도색)을 실시하고 감리회사(트래픽스) 및 교통운영과와 6개월간 매월

1회 모니터링 실시

시공기간 : 2015. 10. 19 ~ 30(기간중 4일)

예산재배정 : 50,000천원(교통운영과, 노면표지선 도색 및 제거)

시행방법

- 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체인 엘씨씨    건설(주)에서 시험시공을 실시(설계변경)

- 시험시공에 사용할 도료는 현재 융착식 노면표지용 도료를 생산하는 6개    회사중 시험시공에 필효한 4종의 도료를 모두 생산하는 2개사(대화페인트,    정석케미칼)에서 대화페인트 제품 구매(서부도로사업소에서 정석케미칼 제품    시험시공 실시)

향후 계획

2015. 10 : 관급자재 구매 및 시험시공 실시

2015. 11 ~2016. 4 : 모니터링 실시

붙임문서 : 관련 공문 1부. 끝.