문서번호	급수설비과-1096
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	급수설비과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	주무관
	주무관

’15년 노후 옥내급수관 교체(갱생) 추진계획

2015. 2

상수도사업본부

[급수부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 ■ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

’15년 노후 옥내급수관 교체(갱생) 추진계획

녹물이 나오는 '94년 이전 건축한 노후 옥내급수관을 교체(갱생)하여 최상의 아리수를 음용할 수 있는 급수환경 조성

Ⅰ				추진 방향

○ 노후 옥내급수관 100%교체로 음용환경 개선

- 교체공사비 인상 및 지원대상 전면 확대

○ 교체 지원대상 전면 확대 : 조례 개정 추진

○ 음용률 향상을 위한 옥내 급수관 물세척 시범 실시

○ 서울형 도시재생사업지역 노후 옥내급수관 중점 교체

Ⅱ				사업 개요

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 추진

- 노후 옥내급수관 현황 (’14년 12월말 기준)

구 분	계	소규모 주택			중‧대형 주 택	멸실대상 주 택
		소 계	교체완료	미교체
주택가구수	671,000	497,000	194,592	302,408	68,000	106,000

- 교체대상 : 370,408가구 (사업비 2,445억원)

- 사업기간 : ’07. 7 ~ ’20. 12

○ 연차별 추진계획

구 분	계	기교체	향 후 계 획
		’07～’14	소 계	’15	’16	’17	’18～’20
가구수	565,000	194,592	370,408	35,000	67,000	67,000	201,408
사업비(억원)	2,445	626	1,819	169	330	330	990

○ ’14년 추진실적 : 30,503가구(집행금액 89억)

- 사업소별 실적

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표(가구)	35,000	1,100	2,000	5,500	5,700	5,500	3,400	4,700	7,100
실적(가구)	30,503	1,348	2,541	2,369	5,914	5,763	4,326	4,255	3,987

Ⅲ				’15년 추진 계획

○ 노후 옥내급수관 교체․갱생 : 35,000가구(사업비 169억)

○ 교체 지원 대상 전면 확대 : 조례 개정 추진

- 일정규모 이하 주택 ⇒ 중․대형 포함 전체 주택으로 확대

○ 10년 이상 경과된 스테인리스관 등 내식성 옥내 급수관 물세척

- 500가구 시범 실시(사업비 : 75백만원, 15만원/세대당)

○ 서울형 도시재생사업지역 노후 옥내급수관 중점 교체

- 노후‧불량건축물이 많은 도시재생사업지역 아연도강관 교체 중점 추진

○ 장기수선충당금 적립대상 APT 노후 급수관 교체 추진

- 주택건축국 공동주택과 및 해당구청과 협조하여 교체 추진

Ⅳ				세부 추진 계힉

□ 세부 추진계획

○ ’15년 노후 옥내 급수관 교체 : 35,000가구 (169억원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가구수	35,000	1,800	3,500	4,900	6,300	5,000	4,500	4,500	4,500
예산(백만원)	16,892	889	1,700	2,368	3,025	2,432	2,159	2,159	2,160

- 배분기준 : 사업소별 노후 옥내급수관 교체대상 따른 비례배분 및 연간 최대 교체가능 수량 반영

○ 교체공사비 인상 수도조례 시행규칙 개정 : ’15.1.29. 공포

- 교체공사비 인상에 따른 표준지원공사비 개정 사업소 시달 : ’15.1.29

○ 교체 지원대상 전면 확대 : 조례 개정 추진

- 일정규모 이하 주택 ⇒ 중․대형 포함 전체 주택으로 확대

- 노후 옥내급수관 교체대상 전면확대 방침 : ’15. 3월

- 교체대상 전면확대 조례개정 : ’15. 6월

○ 옥내 급수관 세척 시범실시

- 대 상 : ’05년 이전 설치된 스테인리스관 등 내식성 옥내급수관

※ 공용급수관이 비내식성인 공동주택 제외

- 가구수 : 500가구 시범 실시(사업비 : 75백만원, 15만원/세대당)

※ 사업소별 100가구 내외

- 사용예산 : ’15년 노후 옥내급수관 지원예산 사용

- 노후 옥내급수관 지원절차에 따라 지원 (’15. 3 ~ 6월)

	신청 및 접수	⇒	현장조사 (컨설팅, 수질팀)	⇒	공사비 지원 여부 결정	⇒	지원가능 여부 통보
⇒	세척비 지원 신청 (신청자)	⇒	세척비 지원 승인	⇒	세척 시행 (신청자)	⇒	세척결과 통보 (별첨, 신청자)
⇒	세척 후 수질검사 (수질팀)	⇒	공사비지원	⇒	설문조사 (유선)

- 세척 전․후 수질팀 협조하에 수질 검사시행

․ 검사과목 : 잔류염소, 탁도, PH, 철, 구리

- 설문조사, 효과분석 결과 보고(별도 양식 통보 예정) : ’15.6.30

※ 세척 시공사에 별첨 양식 “세척결과보고서” 제출 받아 작성

○ 장기수선충당금 적립대상 APT 노후 급수관 교체 : 352단지

- 장기수선충당금 대상 아파트 현황 (’94. 4월 이전 아연도강관)

구분	계		교체완료		교체대상
	단지	세대수	단지	세대수	단지	세대수
대상아파트	546(100%)	267,500	194(36%)	90,500	352(64%)	177,000

※ 지원공사비 소요예산: 708억원 (공용급수관 세대당 최대 40만원 지원)

- 주택건축국 공동주택과 및 해당구청과 협조하여 교체 추진

․ 교체대상 352단지에 장기수선계획에 반영토록 협조 요청 : ’15. 2월

․ 장기수선계획 미반영시 입주자대표에게 과태료 부과 요구

○ 서울형 도시재생사업지역 노후 옥내급수관 중점 교체

- 교체 대상 : 3,264가구

․ 동북권 2,163가구/ 동남권 461가구/ 서북권 190가구/ 서남권 640가구

- 노후‧불량건축물이 많은 도시재생사업지역 아연도강관 교체 추진

권역별	사 업 위 치 및 주 거 환 경
동북권	○ 장위1동 뉴타운 해제구역(318,415㎡) - 20년 이상 노후건축물 약 75.8%, 아연도강관 714가구 ○ 성동구 성수 1, 2가 일대(886,560㎡) - 20년 이상 노후건축물 약 67.8%, 아연도강관 1,449가구
동남권	○ 강동구 암사1동 일대(635,000㎡) - 20년 이상 노후건축물 약 63.4%, 아연도강관 461가구
서북권	○ 서대문구 신촌동 일대(263,000㎡) - 20년 이상 노후건축물 약 79.4%, 아연도강관 190가구
서남권	○ 동작구 상도 4동 일대(750,000㎡) - 20년 이상 노후건축물 약 69.3%, 아연도강관 640가구

- 추진방법 : 해당사업소에서 해당 권역에 집중 홍보하여 노후 옥내급수관을 교체 지원하고 실적 별도 관리

Ⅴ				홍보 계획

○ 본부

- 자치구 소식지 게재, 안내문 제작 배포 홍보

․ 분기별 반상회보지에 안내문 게제 요청

․ 표준안내문을 제작하여 해당 사업소에 제공

- 주택건축국 공동주택과 및 해당구청과 협조 홍보

- 지하철 내 전광판 및 광고섹터 활용 홍보

․ 홍보마케팅과와 협조하여 안내문안 및 광고섹터 제작 지하철 내 게제

○ 사업소

- 도시재생사업지역 노후 옥내급수관 홍보계획 (서부, 동부, 남부, 강동)

-  해당 사업소장이 직접 관리사무소 방문하여 입주자대표 설득

- 아리수품질확인제 가정방문시 수질검사 및 노후 옥내급수관 교체 홍보

- 통․반장 회의시 사업취지 설명, 홍보안내문 대문 부착 및 배포

- 설비업체, 인테리어업체, 공동주택관리자 간담회 개최

- 동파관련 설비업체 활용 홍보

- 홍보용 리플렛 구청 민원실 및 동사무소 비치

- 지역신문, 케이블방송사 협조를 통한 홍보

- 학습동아리 활동과제로 선정 사업촉진 및 성과제고

- 공용급수관 교체공사 시 단지 내 현장사무실 운영 세대급수관 홍보 및 신청 접수

Ⅵ				행정 사항

○ 8개 수도사업소 경쟁체제 도입, 우수 사업소 인센티브 부여

- 경영실적평가에 노후 옥내급수관 교체실적 반영 : 배점 4점

- 노후 옥내급수관 교체 우수 직원 포상 : 2명 (2개 사업소)

- 우수사업소 포상 추진 : 3개 사업소 (최우수 1, 우수 2)

※ ’15년 교체실적을 평가하여 ’16년 1월에 시상(최우수 3백만원, 우수 2백만원)

○ 2015년 사업소 자체 세부 추진계획을 수립하여 ’15.2.27까지 보고

○ 세척 및 교체실적을 월보 양식에 의거 매월 말 기준 다음 달 1일까지 보고하기 바람

○ 사업소별 교체대상 증․감사항에 대하여 ’15.7.30일까지 보고 (연차별 교체계획 수립에 반영 예정)

붙 임 : 1. 2015년 사업소별 사업목표 및 지원예산 1부

2. 2015년 사업소별, 월별, 분기별 교체 추진계획 1부

3. 옥내급수관 교체 지원현황 (월 보고 양식) 1부

4. 표준안내문 1부.

5. 옥내급수관 세척 결과보고 및 설문조사 양식.  끝.