문서번호	녹지관리과-1857
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	녹지관리과장		중부공원녹지사업소장
협 조
	★청사운영1팀장
	공원운영과장
	시설과장
	북서울꿈의숲관리사무소장

2015년 서울광장 잔디 식재계획

2015. 3

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 봄철 서울광장 잔디 식재계획

서울광장내 잔디가 각종 행사와 스케이트장 운영 등으로 고사된 바, 식재하여 봄을 맞는 푸른광장으로 조성하고자 함

□ 서울광장 현황

❍ 잔디면적 : 6,449㎡(한지형 잔디)

❍ 기타시설 : 분수대녹지대 65㎡, 원형화분 92개, 바닥분수 102㎡

□ 잔디식재 계획

❍ 식재기간 : ‘15.3.15 ~ 3.22

- 폐잔디 반출▪지반정리(3.15~18), 잔디식재(3.19~20), 뒷정리(3.21~22)

❍ 식재방법 : 관리인부 직영식재

❍ 식재인원 : 1일 100명(연 200명)

❍ 잔디조달 : 동부공원녹지사업소 덕은양묘장에서 공급

❍ 소요예산 : 25백만원(장비사용 및 폐기물처리 경비등)

- 남산 및 산하공원 운영, 사무관리비(일상경비를 교부받아 지급)

□ 행정사항

❍ 상수도사업본부 생산관리과 아리수 지원(1,000병) 요청(3.13)

❍ 동부공원녹지사업소 잔디공급 요청(3.18~19)

❍ 현장근로자 및 식사 지원 요청(3.19~20)

- 북서울꿈의숲(15명),시설과(10명),공원운영과(45명),녹지관리과(30명)

- 식사(간식포함) : 총무과

□ 향후계획

❍ ‘15. 3 ~ 4.30 : 잔디식재 및 급수, 활착을 위한 사용통제

❍ ‘15. 5 ~ 12   : 급수, 비배작업 등 잔디관리, 부분 보식

- 여름철 답압피해 등 잔디상태를 확인하여, 하반기(9월) 전면교체 판단

첨부 : 잔디식재 세부추진 일정 1부. 끝.

잔디식재 세부추진 일정

시간 요일	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	투입 인원
3/15 (일)						점심	잔디 컷팅 작업 (소드캇타기 2대)												12
3/16 (월)		폐잔디 채취 (바브켓 주간 2대)					적치 작업 (굴삭기 1대/바브켓 야간1대)								폐잔디 운반 및 모래반입 (덤프12대 철거/반입8대)				12
3/17 (화)		수평 고르기 (그레이더1대)					답압 작업 (로울러 1대)												12
3/18 (수)		지반 정리 마무리					기타 시설물 점검 (쿨러,큐시밸브) (비료살포기1대/비료20포)				구역설정	잔디하역(배치) (파렛트 35㎡/100개 지게차 4시간)							12
3/19 (목)	사전준비	잔디식재					잔디식재				잔디식재								100
											(잔디하역/반입 지게차 4시간)
3/20 (금)	사전준비	잔디식재					잔디식재 (잔디식재 완료 2시간전부터 광장요원 뒷정리)												100
3/21 (토)		잔디식재 (파렛트 운반 차량1대) (짜투리 폐잔디 차량1대)					뒷 정리 잔디담압/잔디통제 (로울러 1대)												30
3/22 (일)		관수 작업					관수 작업 (광장사용 통제:3.22~4.30)												12

서울광장 현황사진