문서번호	시설과-1002
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
협 조
	조경과장
	추진반장
	주무관

2015년 서울대공원 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제 점검·정비  계획

2015년 2월

서울대공원

( 시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 서울대공원 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2015년도 우기를 대비하여 공원내 각종 수방시설과 공사장 및 축대, 옹벽, 급경사지 등 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기 전까지 정비를 완료하여 풍수해를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 하천관리과-1831(‘15.2.5) 『2015년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 일제점검 시행』

Ⅱ		점검대상

□ 하천 및 수방시설물

◦ 소하천 : 4개소(금붕어광장연못, 조절저수지, 자연캠프장, 서울랜드)

◦ 제  방 : 2개소(금붕어광장연못제방, 조절저수지제방)

◦ 하수암거 : 4개소(반도지암거,해양관암거,저수지암거,큰물새장암거)

◦ 하수도 : 45.7km

◦ 우․오수맨홀 : 498개소

◦ 빗물받이 : 537개소km

◦ 오수처리장 : 1개소

□ 풍수해 취약시설 및 지역

◦ 공사장

▷ 토목시설물 유지보수공사, 건축시설물 유지보수공사, 표범사 환경개선공사 ⇒ 시설과

▷ 서울대공원 곰사 환경개선공사 ⇒ 조경과

▷ 서울대공원 지하구 소방시설공사 ⇒ 기반시설 안전추진반

◦ 사면시설  : 공원내 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽등 ⇒ 조경과

◦ 지하시설  : 동물원 및 호수순환 공동구 등 ⇒ 시설과

◦ 유수 장애시설

▷ 하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애 시설 ⇒ 시설과

▷ 산림내 숲가꾸기 부산물 등 ⇒ 조경과

Ⅲ		추진계획

□ 점검 및 정비 기간 : 2015. 2. 16 ~ 2015. 4. 23

점검계획 수립 및 대상파악 제출 (2.13까지 제출)		1차 점검 시 행 (2.16~3.20)		지적사항 보완조치 (3.21~3.31)		조치결과 제출 (4.3까지)
[총괄부서]		[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]
2차 집중점검시행 (1차점검시 미 조치사항 위주) (4.6~4.17)		지적사항 정비완료 (4.18~4.23)		조치결과 제출 (4.24까지)
[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]

※ 총괄부서 : 시설과

※ 담당부서 : 시설과, 조경과, 기반시설 안전추진반

□ 단계별 점검 및 정비(세부)

【1차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 담당과장

◦기  간 : 2015. 2. 16 ~ 3. 20까지

▷ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 전문가 등과 대상파악 및 점검․정비

▷ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

【2차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 관리부장

◦기  간 : 2015. 4. 6 ~ 4. 17까지

▷ 관리부장, 담당 부서장, 전문가 등 합동점검

▷ 2015. 4.23까지 1․2차 점검시 지적사항 전체 정비완료

Ⅳ		행정사항

□ 점검대상, 지적사항 및 조치결과 제출

◦ 총괄부서(시설과)에서 자료수합 작성 및 제출

- 점검계획 수립 후 방침서 및 대상현황 제출 : 2015. 2.13(금)

☞ 1차 지적 및 조치결과는 4.3(금)까지 총괄부서에서 하천관리과로 제출
☞ 2차 지적사항 및 조치결과는 4.24(금)까지 하천관리과로 제출
◦ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 대책마련

☞ 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

첨 부 : 1. 풍수해취약시설(지역) 현황 1부.

2. 수방시설 및 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.