아동시설 기능보강

사 업 계 획 서

1. 사 업 명

□ 사업구분 : 노후 건축물 개보수

□ 대상 시설 : 시립아동상담치료센터

□ 대상 건물 : 시립아동상담치료센터 본관동

2. 사업목적 : 본 센터의 건물이 건축 후 26년이 되었으며 오배수 배관 및 정화조 배관이 노후되어 건축물의 배관 설비를 개보수 함으로서 입소아동들의 생활에 안전을 기하고 위생적인 환경을 조성하고자 함.

3. 사업추진경위

□ 2011년 12월 : (주)우리구조기술사사무소 안전진단보고서에서 본 센터 본관동 각층 실내 천정 누수로 조사 보고함.

□ 2012년~2013년 : 본 센터 건축물의 오배수 배관 및 정화조 배관이 부분적으로 노후의 징후를 보이기 시작하여 배관이 터지는 상황이 발생되어 직원들이 수리를 해옴.

□ 2014년 11월 : 국고보조금 대상시설 결정

4. 사업내용

□ 사업기간 : 2015년 1월 ~ 9월

□ 사업규모 : 본관동 지하 1층 ~ 지상 3층 건물 2,646㎡

□ 예    산

(단위 : 천원)

총 계	국 비	지 방 비	자 부 담
227,000	111,000	111,000	5,000

- 사업추진일정

구 분	기 간	목 표	사 업 내 용
1단계	‘15. 1월~2월	설계업체 선정 및 설계	설계 견적 검토
2단계	‘15. 3월~4월	설계 검토 및 국고보조금 신청	설계검토를 통한 사업의 타당성 검증 및 국고보조금 신청서 제출
3단계	‘15. 6월~8월	공사입찰 및 착공공사 진행	입찰을 통한 공사업체 선정 및 공사착공
4단계	‘15. 9월	공사 준공	준공 및 하자 검토

5. 사업수행주체 : 시립아동상담치료센터

6. 보조사업 소요경비의 자체부담계획

(단위 : 천원)

자부담액	자부담 내용	자부담 확보 방안
5,000	배관설비 개보수공사	법인 전입금

7. 사업의 효과 : 건축물의 노후된 오배수 배관 및 정화조 배관 설비를 개보수함으로써 입소아동들의 생활에 안전을 도모하고 위생적인 환경이 조성됨.

8. 예상 문제점과 대책 : 해당사항 없음.