□  2015년 예산 편성액 : 13,000백만원

○ 예산투자 및 ‘15년 편성액 통계목 변경 현황

사업규모	사업기간	년차별 투자현항								비고
		구 분	계	기투자	‘14년	‘15년 편성액			‘16년 이후
						당초	변경	증.감
․도로확장 B=6차로(28m) → 10차로(48m) L=900m ․지하차도 신설 B=48m, L=260m ․U-Type 옹벽 B=48m, L=320m	2010.10 ~ 2015.12 (‘17.12월 준공 연기예정)	계	98,391	37,469	12,600	13,000	13,000	-	35,322
		공사	77,409	23,943	10,487	11,703	12,494	791	30,485
		보상	14,464	10,168	1,547	-	-	-	2,749
		용역	6,453	3,329	542	1,291	500	791	2,082
		기타	65	29	24	6	6	-	6

○ 2015년 예산 집행 추진계획

￭ 시설비 12,494백만원(공사비 12,494백만원,  보상비 -)

-‘15. 5  : 2단계 완료 및 3단계 교통전환

-‘15. 8  : 3, 4단계토공 완료(L=1,160m)

-‘15. 12 : 4단계 구조물 L=580m 중 L=580m 완료

‧ 토공 : 흙깎기 외 44,146㎥×31천원 = 1,348,603천원

‧ 비탈면안정공 : 네일보강 외 20공×5,206천원 = 104,120천원

‧ 배수및옹벽공 : VR관 외 284m×655천원 = 186,265천원

‧ 구조물공 : 지하차도 580m×4,769천원 = 2,766,243천원

‧ 포장공 : 아스콘포장 외 11,211㎡×13천원 = 148,701천원

‧ 교통안전시설공 : 방호울타리 외 196m×9천원 = 1,880천원

‧ 부대공 : 암파쇄방호시설 외 960m×956천원 = 918,424천원

‧ 상수도공 : 관접합및부설 외 168m×3,454천원 = 580,350천원

‧ 물가변동외 : 269,107천원×1식 = 269,107천원

‧ 제경비 : 2,269,734천원×1식 = 2,269,734천원

‧ 관급자재 : 3,523,473천원

-아스콘(5,324ton), 레미콘(14,051㎥), 이형철근(1,753ton), 파형강판(527ea) 외

‧ 폐기물, 전기공사 : 377,100천원x1식 = 377,100천원, 폐기물(14,900ton)

‧ 보상비 : -

￭ 용역비 : 500백만원

‧ 감리비 : 500,000천원x1식 = 500,000천원

￭ 기타(시설부대비) : 6백만원

‧ 시설부대비 : 6,000천원x1식 = 6,000천원