□ 평가 항목 배점 및 담당자

연번	항 목	배점	총괄과	총괄 담당자	비고
	계	100
1	유수율 증대실적	57	요금과	백형기
2	누수탐지	7	급수운영과	임인택
3	기존관 철거	3	급수운영과	한호진
4	불용관 정비	4	급수운영과	한호진
	4-1. 과년도 불용관정비	(1)
	4-2. 현년도 불용관정비	(3)
5	유수장애 상수도관이설	3	급수운영과	김자영
6	재개발 ․ 재건축 지역관리	3	시설관리과	송종범
7	유량계 및 유량감시시스템 관리	5	시설관리과	함태광
8	가압급수 지역관리	5	급수운영과	한호진
9	조례위반 처분추징 실적	4	요금과	김동춘
10	중블록 유수율 목표관리	5	급수운영과
			시설관리과	황대룡
11	유수율(공급량․조정량, 단위사업) 분석	2	요금과 급수운영과	백형기
12	유수율 유공실적	2	요금과 급수운영과 시설관리과

누수탐지 증대

[총괄담당 직 성명 :  급수운영과 6급 임인택]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	평가배점	목 표	실 적	실적율	비 고
2	누수탐지	7	152건	53건	35%

2. 현 황

○ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관로 집중탐지

○ 취약지역에 대한 누수 조기발견 탐지활동 강화

3. 추진사항

구분	계획		실적				방지량(㎥/일)
	소블록수	탐지	소블록수	다점. 음청탐지
				계	정탐	오탐
건수	161	152	35	53	53	.	17,200

※ 평가기준(인정) 실적 : 계획탐사시, 급수관, 배수본관, 불용관, 하수BOX내 누수 등

4. 추진대책(계획)

○ 누수 취약지역 집중탐지

- 단일배관, 수계전환 불가지역 : 9개 관로, 7.7㎞

- 지하철 공사장 노출관로 : 9호선(7개 공구) 4.7㎞

- 누수다발관로 탐지(3회이상 누수발생) : 14개 관로, 1.6㎞

- 누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

○ 다점형 상관식 집중탐지

- 누수가 많이 발생한 블록 및 누수다발관로를 우선으로 탐지 시행

구 분	계	최근 3년간 누수발생현황
누수발생건수	-	50건 이상	11~49건	10건 이하
소블록수	161	10	94	57
탐지시행계획	-	년3회이상 반복탐지	년2회이상 반복탐지	년1회이상 탐지

○ 음청식 누수탐지

- 건물내 수돗물 유입으로 인한 민원탐지

- 지하철역사 주변 및 대형공사장주변 음청식 탐지 :32개 역사,D=80~400㎜ L=16㎞

- 분기별 추지계획

대 상			분기별 목표
			2/4		3/4		4/4
역사	구경(㎜)	연장(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
2,3,5,8,9	D80~400	16	2,9호선 10개역사	5.2	3,8호선 9개역사	5.2	5호선 13개 역사	5.6

○ 기타 하수박스내 누수탐지

- 하수박스 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

- 상,하반기 1회씩 탐지 시행

기존관 철거

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 한호진]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표(㎞)	실적(㎞)	실적율	비고
3	기존관 철거	3	6.5	0.0	0.0

2. 현 황

구 분	목표(㎞)	철거연장(㎞)	철거율(%)	비 고
2014년	3.08	1.96	63.6	순위 4위
2013년	2.80	1.00	35.7	순위 3위

3. 추진사항

○ 기존관 철거는 단위사업(노후배급수관)의 미착공으로 철거율(철거연장÷부설연장)은 4월말 현재 0%로 매우 저조한 실정임.

단위공사의 조속한 공사 착공으로 상반기 철거실적을 향상

4. 추진대책(계획)

○ 공사 시 감리원을 상주시켜 부설관로 위치를 정확히 결정하여 기존관을 78% 이상 철거하여 평가에 대비토록 조치

○ 시공업체 및 시설관리공단 감리원을 교육하여 기존관 철거의 중요성을 확실히 인지시켜 철거율 향상추진

○ 금년에는 배급수관정비공사 목표연장에 연간단가공사 정비목표(1.1㎞)가 있는 관계로 지역담당 직원들의 철거율 향상의지가 목표 달성에 중요함.

불용관 정비

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 한호진]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표(건)	실적(건)	실적율	비고
4	현년도 불용관 정비	3	387	220	56.8	4월 현재
	과년도 불용관 정비	1	1	1	100

2. 현 황

구 분	목표(건)	실적(건)	실적율(%)	비 고
2014년	360	622	172.8	순위 1위
2013년	750	985	131.3	순위 1위

3. 추진사항

○ 2015년 유수율 향상을 위한 불용관 정비계획 수립 시행중으로, 4월말 실적 56.8%로 정상 추진중

4. 추진대책(계획)

○ 불용관 철거시 분기점을 폐쇄하여 누수요인을 근본적으로 제거

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

○ 재개발지역내 배급수관을 통하여 급수하지 않는 인입관은 폐쇄조치

○ 2014년 사업소별 정비실적 비교시 사업소 중 1등하였으나,

100%이상시 동일점수 부여로 감점을 당하지 않는 것이 중요한 변수로 적용

※ 미정비 불용관 적출시 건당 0.1~0.2점 감점 대상이나 보고서 작성 후 관리

(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 감점처리를 하지 않음.

가압급수지역 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 한호진]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실 적	비 고
8	유수율 편차해소	3	유수율편차 유지 (91.52~100%)	91%이하 1 100%초과 2	상반기 1~6월 하반기1~12월
	유수율 정확도 개선	2	수전정보와 지역상이시 감점	-	신설

2. 현 황

○ 점검대상 : 가압급수지역 6개소(거마, 오금, 가락1, 가락2, 명일, 천호)

○ 가압급수 지역 담당자 지정

(2월 유수율 기준)

구 분		거 마	오 금	가락1	가락2	명 일	천 호
2015년	유수율(%)	83.20	97.49	105.19	96.69	96.14	109.11
2014년	유수율(%)	89.13	92.89	88.13	95.78	90.04	103.99
담 당 자		이덕규	조봉구	조봉구	조봉구	함인석	양봉우

3. 추진사항

○ 2014년 가압급수구역 유수율 증대계획 수립 시행

○ 유수율 낮은 취약지역(중블록 및 가압지역) 추진계획 수립 시행

○ 가압급수구역 담당자별 유수율 관리 추진

- 거마가압장 : 집중 누수탐지로 80mm 누수복구 시행(4월)

- 가락1증압 : 과 포함된 4개수전 변경요청(5월)

- 천호증압장 : 경계밸브 조사 및 가압지역 수전확인 중

4. 추진대책(계획)

○ 경계밸브 개폐여부 확인 및 집중 누수탐지 시행

○ 유수율 수준에 따라 달성목표 설정

- 90%이상 지역→5% 향상, 85~90%→5~10% 향상, 85%미만→10%이상 향상

○ 가압 급수지역 유수율 향상 및 편차 해소

- 유수율이 낮은 85%이만 지역을 우선적으로 향상 추진

- 유수율 100%이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차해소

중블록 목표 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 한호진]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	관리대상	실 적	비 고
11	유수율 편차 해소	3	유수율편차 유지 (91.52~100%)	91%이하 1 100%초과 1
	중블록 목표 관리	2	유수율 목표달성	-

2. 현 황

○ 중블록 유수율 현황 및 관리책임자 강화

(2월 유수율 기준)

구 분		계	광 암 1	광 암 2	광 암 3	길 동
유수율 목표		96.72	97.30	96.80	97.20	95.60
2015년	유수율(%)	93.05	90.00	95.58	93.15	93.27
2014년	유수율(%)	96.32	98.85	95.87	98.02	93.60
담 당 자		조봉구	조봉구	이덕규	최지영	황대룡
책 임 자		김용현	김용현	이경재	김용현	송종범

3. 추진사항

○ 유수율 편차는 중블록 모두 이상없이 추진중3.

○ 중블록별 유수율이 목표대비 저조한 실정으로 유수율 향상추진

4. 추진대책(계획)

○ 중블록별 책임자(담당자) 지정 추진

- 블록담당은 유수율 하락 시 신속한 원인규명 및 해소 대책 강구

○ 유수율 향상을 위한 추진계획

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지시행

- 노후관 및 불용관 정비철저

- 유량감시 시스템을 활용하여 중블록별 효율적인 분석을 실시하여 공급량 감소 대책 적극 추진

○ 중블록별 경계 밸브 추가 조사 시행

- 중블록 및 배수지, 가압장 급수구역 경계 노후 밸브 우선 정비

담당자별 유수율 관리계획을 수립(경계밸브 점검 및 전산코드 일치등) 시행

유량계 및 유량감시시스템 관리

[총괄담당 직 성명 : 시설관리과 6급 함태광]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실적	실적률	비고
8	유량계 및 유량감시시스템 관리	5	지적건수 ‘0’건	2	0.92

2. 현 황

○ 유량계 시설 현황                                    (2015. 5. 현재)

총 계	구 역	중블록	가(증)압장	배수지	비 고
10개소 13대	1개소 1대	2개소 2대	5개소 6대	2개소 4대

○ 2014년 사업소별 점검지적 현황

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
대 상	129	84	102	27	45	105	39	12
실 적	6	2	5	1	6	7	5	2	지적건수
실적률	0.98	0.99	0.98	0.98	0.93	0.97	0.94	0.92

☞ 상, 하반기 본부점검에 의한 유량계의 유지관리 상태를 점검

3. 추진사항

○ 매월 유량계 시설 및 유량감시시스템 정기점검 실시

○ 배수지, 가압장 초음파유량계 교정검사용역 실시

4. 추진대책(계획)

○ 본부 점검 시 지적 사항이 없도록 매월 점검하여 유지관리에 만전을 기함.

조례위반 처분

[총괄담당 직 성명 : 요금과 7급 김동춘]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실적	실적율	비고
10	조례위반 처분	4	1,757㎥	(2건)	(2건)

2. 현 황

◦ 연도별 조례위반 처분현황

연 도	2010	2011	2012	2013	2014
건수(건)	18	17	24	41	2

※ 조례위반 행위는 주로 신·개축 공사현장에서 발생

◦ ′13년 유형별 단속현황

구 분	계	계량기무단 철거 및 이설	급수도용 및 부정급수공사	무단공급	혼용급수	계량기작동 방해 및 훼손	기타
건 수(건)	41	38 (92.7%)	3 (7.3%)	-	-	-	-
추징량(㎥)	165	31 (18.3%)	134 (81.2%)	-	-	-	-
금 액(천원)	6,483	5,454 (84.1%)	1,029 (15.9%)	-	-	-	-

수돗물 무단공급(옆건물로 호스연결 사용)

3. 추진사항

○ 신․개축지 공사현장 특별점검 계획수립

○ 송파․강동구청(건축과)에 건축허가지역 자료요청

○ 계량기 교체요청시 망실, 조작여부 확인요청

4. 추진대책(계획)

○ 상수도급수장치 관리안내문 건축공사현장에 배부

○ 건축공사현장 현장점검 복명, 위반여부 기록관리

○ 검침원 검침시, 계량기 교체시 위반여부 적출통보 협조체계 유지

유수율 향상 대책

[총괄담당 직 성명 : 요금과 6급 백형기]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	평가배점	목 표	실 적	실적율	비 고
1	유수율 향상 실적	57	96.60%	92.14%	95.38%	’14년 1~3월실적

2. 현 황

○ ’13년 12월부터 전체 평균대비 유수율이 계속 하락하고 있으며, 전년대비 공급량은 증가하고 조정량은 감소함

○ 공급량 증가 사유

- 암수수계는 ’13.12.15~’14.2.15에 공급량이 일시 증가후 평년상태 유지로 원인불명

- 광암수계는 ’13년 5월 유량계 교체후 유효율이 향상되어 상대적으로 공급량 증가

○ 조정량 감소 사유

- 인구감소, 온난기온, 절수기 사용, 요금인상 등 전체적으로 사용량 감소      ○ 전년대비 월별 유수율 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
’13년(%)	91.01	100.16	95.44	102.52	102.13	97.57	97.35	93.73	98.40	94.50	94.18	89.33
’14년(%)	88.62	97.94	92.54	※ 전년도 유수율이 하향하는 6월이후(8월납기)부터 평년수준 회복전망
증감(%)	-2.39	-2.22	-2.90

3. 추진사항(실적)

○ 2014년 유수율 향상대책 및 취약지역(중블록 및 가압장)유수율 향상대책 수립

○ 유수율 향상을 위한 월별 공급량 조정량 증감원인 분석

○ 암사 우면산 수계 KD-6관로 유량계 비교측정(오차율0.11%로 범위내)

○ 광암정수장 청담계통 대형급수관(1,800mm) 복구공사 시행

4. 추진대책(계획)

○ 조정량분야의 장기인정검침 수전정비, 미검침·미등록 수전정비,조례위반단속 강화

○ 공급량 감소를 위한 급수구역별 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 및 조정

○ 유량계 및 유량감시시스템 정기 및 수시 관리점검

○ 수계지역과 요금조정지역 일치화 작업 : 요금관리시스템의 수계코드 정비

○ 누수다발, 취약지역 집중 누수탐지로 조정량 확보 및 공급량 감소 추진