2015년 작은도서관 조성사업 보조금 교부신청서

1. 사업개요

ㅇ 지자체명 : 서울시 양천구

ㅇ 조성공간 : 신정2동 주민센터 2층

ㅇ 주    소 : 서울특별시 양천구 목동동로 154

ㅇ 도서관명 : 신정2동 작은도서관

ㅇ 사업유형 : 생활밀착형

ㅇ 사업기간 : 2015년 3월 ～ 12월

ㅇ 규    모 : 142㎡(설계중 변경 가능)

ㅇ 운영주체 : 지자체 직영

ㅇ 특    징

- 주민자치센터 내에 조성되어 지역주민의 접근성이 뛰어난 작은도서관임

- 주민자치 프로그램과 연계되어 이용률이 높고, 효율적인 운영이 가능

2. 조성 후 운영계획

ㅇ 조성 이후 지자체의 운영예산 지원계획                    (단위:천원)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	계
예산	35,000	40.000	45,000	50,000	50,000	220,000

ㅇ 운영 및 활동계획

- 운영인력 : 총 25명(사서 1명, 자원봉사자 20명, 사회복무요원 1명)

총 25명 중 상주인력 1명(사서)

- 운영시간 : 평일 09:00 ～ 18:00, 토요일 09:00 ～13:00

- 비치도서 ‧ 물자

․도서 9,650권 비치(향후 15,000권 확보 목표 : 5,350권 추가 구매)

․PC 5대, 프린터 2대, 복사기 1대 등

- 운영프로그램

(단위 : 개 / 명)

프로그램 명	현재까지 운영실적		향후계획
	프로그램 수	참여자 인원	프로그램 수	참여자 인원
도서관 이용		11,073명/년		20,000명/년
방과후 교실	2	600명/년	3	1,000명/년
독서지도강좌			2	240명/년
주말영화상영			1	360명/년
총 계	2	11,673명/년	6	21,600명/년

- 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등

: 설문서 배부, 구정홍보물 배부, 동 주민센터 각종 회의시 홍보 등

3. 예산계획

ㅇ 총괄표

(단위 : 천원)

계	국비	지방비		기타	비고
		시도비	시군구비
140,000	70,000		70,000

ㅇ 집행계획(지방비 포함 총 사업비 집행계획)

(단위 : 천원)

구 분	세부 내역	재원별 현황				전체 대비 비율
		국고	지방비	기타	소계
시설비 (설계비포함)	설계비	5,000	5,000		10,000	86%
	리모델링 공사비	55,000	55,000		110,000
자산취득비	컴퓨터, 리더기, RFID 회원카드 등	5,000	5,000		10,000	14%
	서가, 책상, 의자 등	5,000	5,000		10,000
계		70,000	70,000		140,000	100%

4. 사업추진일정

ㅇ 2015.  3월 : 작은도서관 조성 주민의견 수렴

ㅇ 2015.  4월 : 신정2동 작은도서관 조성계획 수립

ㅇ 2015.  5월 : 설계용역 발주

ㅇ 2015.  7월 : 조성공사 착공

ㅇ 2015.  9월 : 조성공사 준공

ㅇ 2015. 10월 : 신정2동 작은도서관 개관식

※ 신정2동 작은도서관 조성 주민의견수렴 내용

구분	일자	참석인원	장소	의견수렴내용
주민의견 수렴	2014.9.25	150여명	신정2동 주민센터	‘구청장과의 대화’ 행사 중 신정2동 작은도서관 조성 및 운영 계획 협의 (주민참여활동 여부 등)

ㅇ 주민의견 수렴 결과

- 자치센터내 도서관 조성은 접근성이 좋아 이용에 편리하고, 효율적 공간활용으로 도서관 활성화 기대(대다수 긍정적 의견)

ㅇ 주민 참여활동 분야 등

- 양천구 명예사서 양성 교육 수료 후 동도서방 자원봉사 활동 : 5명

- 동도서방 자원봉사자 : 11명

5. 작성자

ㅇ기관명 : 서울시 양천구청            소속 : 교육지원과

ㅇ담당자 : 직급 7급                   성명 : 권명진

ㅇ연락처 : 전화 02-2620-3119           팩스 : 02-2620-4117

이메일 : kmj105@yangcheon.go.kr