2015년 작은도서관 조성사업 보조금 교부신청서

1. 사업개요

ㅇ 지자체명 : 서울특별시 은평구

ㅇ 조성공간 : 은평구청 청사 1층

ㅇ 주    소 : 서울특별시 은평구 은평로 195 은평구청 1층

ㅇ 도서관명 : 은평작은도서관

ㅇ 사업유형 : 생활밀착형

ㅇ 사업기간 : 2015년  1월 ～ 2015년 4월

ㅇ 규    모 : 49㎡

ㅇ 운영주체 : 은평구 직영

ㅇ 특    징 : 구청 로비 유휴공간을 활용하여 도서대출, 열람실 운영 및

주민 열린공간으로 활용

2. 조성 후 운영계획

ㅇ 조성 이후 지자체의 운영예산 지원계획

*연도별 운영비 확보계획(5년간)

(단위:천원)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	계
인건비	92,000	96,600	101,430	106,501	111,826	508,357
일반운영비	5,560	5,838	6,129	6,436	6,758	30,721
도서구입비	-	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000

※ 인건비 호봉승급, 일반운영비 물가 상승분 등을 고려하여 매년 5% 인상

ㅇ 운영 및 활동계획

- 운영인력 : 총 3명(사서 2명, 사회복무요원 1명)

- 운영시간 : 09:00 ~ 18:00

- 비치도서 ‧ 물자 확보

	수 량	확보방안
도 서	21,000권	신규구매1,000권, 기존도서 20,000권
컴퓨터 및 모니터	4석	신규구매
서가	8EA	신규구매(제작)
책상	3EA	기존물자 사용1, 신규구매2
의자	10EA	신규구매10

- 운영프로그램 : 도서대출, 열람실 운영

- 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등 : 은평구 소식지, 홍보자료 등

3. 예산계획

ㅇ 총괄표

(단위 : 천원)

계	국비	지방비		기타	비고
		시도비	시군구비
144,000	70,000		74,000

ㅇ 집행계획(지방비 포함 총 사업비 집행계획)

(단위 : 천원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비고
설계비	10,000천원	은평작은도서관 설치 실시설계 용역비
공사비	120,000천원	은평작은도서관 설치 공사비
자산취득비	14,000천원	가구, 도서검색용 PC등 구매
계	144,000천원

4. 사업추진일정

ㅇ 은평작은도서관 설치 설계용역 추진  : 2015. 1월초

ㅇ 설계용역 완료 : 2015. 1월말

ㅇ 은평작은도서관 설치공사 착공 : 2015. 2월초

ㅇ 은평작은도서관 설치공사 준공 및 개관 : 2015. 3월말

5. 작성자

ㅇ기관명 : 은평구청    소속 : 문화관광과

ㅇ담당자 : 행정8급 장 희 철

ㅇ연락처 : 02-351-6533  팩스 : 02-351-5631  이메일 : hitchul@ep.go.kr