문서번호	조경과-898
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
협 조

2015년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

2015. 1.

푸른도시국

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(	토지 및 건물 소유자	)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정자마당을 조성하여 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

추진방향

수목보호기술자의 정확한 진단에 의한 보호수 유지관리 사업 시행

직접적인 유지관리외에도 주변 여건을 고려한 생육환경 개선

보호수 주변 정자마당 조성으로 지역주민의 휴식과 만남의 장소 제공

사업개요

현    황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 214주

사업기간 : 1999년 ~ 계속

사업내용

‣ 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 지정보호수 생육환경 개선

‣ 지정보호수 주변 정자마당 조성으로 만남과 휴식의 장소 제공

총사업비 : 14,160백만원(‘14년 이전 6,164, ‘15년 2,200, ’16년 이후 5,796)

그 간의 추진실적

기    간 : 1999년 ~ 2014년

규    모 : 보호수 유지관리 1,726주(‘14년 171주)

총사업비 : 6,164백만원(‘14년 359백만원)

2015년 사업계획

사업기간 : 2015. 1 ~ 10월

사업대상 : 23개 자치구 192주

사업내용

‣ 지정보호수 유지관리

- 위치 및 규모 : 종로구 연지동 136-74 등 192주

- 내용 : 외과수술, 수형조절 및 고사지 제거, 영양공급, 병해충 방제 등

‣ 지정보호수 정자마당 조성

- 위치 및 규모 : 구로구 가로봉동 13-175 일대 583㎡

- 내용 : 토지(535㎡) 및 건물(3동) 보상

소요예산 : 2,200백만원

(단위 : 천원)

계	지정보호수 유지관리 [공사비]	지정보호수 정자마당 조성 [보상비]	비 고
2,200,000	400,000	1,800,000

예산과목

‣ 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터조성), 시설비(401-01)

추진일정

지정보호수 유지관리	지정보호수 정자마당 조성
‣‘15. 1. : 사업비 재배정 ‣‘15. 1. ~ 2. : 설계시행 ‣‘15. 2. ~ 9. : 공사시행 ‣‘15. 10. : 준공보고 ※ 공종별 적기에 유지관리 시행	‣‘15. 1. ~ 2. : 토지․건물주 보상협의 ‣‘15. 3. : 도시계획시설(공공공지) 지정 등 도시계획 절차 이행 ‣‘15. 5. : 지적측량, 보상감정 등 ‣‘15. 5. ~ 9. : 토지․건물 보상 (재결신청) 등 ‣‘15. 10. : 시유재산 취득 보고 ‣‘16. 1. ~ 6. : 실시설계 및 사업시행

추진방법

지정보호수 유지관리

‣ 수목에 대한 병징, 수세쇠약 원인 등을 전문가 진단·처방으로 시행

‣ 유지관리 공종별(병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형조절 및 고사지 제거 등) 적기에 작업 시행

‣ 소나무는 수형유지를 위한 적정한 속가지 제거작업을 통해 고사 가지 발생 방지

‣ 공종이 단순하고 소액이므로 사업비 일괄 재배정 하여 자체 설계로 시행하고 설계심의는 생략

지정보호수 정자마당 조성

‣ 도시계획시설(공공공지) 결정 등 관련 절차 적기 이행

‣ 감정평가, 토지 및 건물 매입 등 보상이 원활히 추진될 수 있도록 소유자 및 보상 관련 부서와 긴밀한 협조체제 유지

‣ 토지 매입 후 소유는 시소유(서울특별시)로 등기

‣ 주변현황, 접근성 등에 대한 정확한 분석으로 많은 시민이 이용할 수 있도록 전문가 등의 자문․설계를 통하여 조성 추진

행정사항

정자마당 조성사업 자체 추진계획 수립 제출 : 2015. 1. 30까지

유지관리 사업 착공/준공보고(보호수별 공사내용 첨부) : 5일 이내

보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저

「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 등 기록관리 철저

붙임 : 1. 2015년 지정보호수 유지관리 사업대상지 및 가내시 내역 1부.

2. 정자마당 조성 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부.

3. 착공/준공보고 서식 1부.  끝.