2015년도 생활체육시설 확충대상 사업계획서

□ 일반개요

○ 위        치 : 송파구 잠실동 올림픽로 25번지 잠실종합운동장 내

○ 소유자(관리부서) : 체육시설관리사업소

○ 토지이용계획 : 지역지구(자연녹지지역), 도시계획시설(운동장)

○ 대지(활용)면적 : 약 360㎡ (9m×20m×2면)

○ 기존시설현황 : 인근 보조경기장 1면 (천연잔디, 육상트랙)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 야외 배드민턴 (족구장 겸용) 다목적경기장 조성

○ 사업기간 : 2015. 5월 ~ 9월 (4개월)

○ 사업규모 : 2면

- 대한배드민턴협회 규격 (폭 6.1M × 길이 13.4M)

- 대한족구협회 규격 (폭 6.5M × 길이 15M)

○ 사업내용

- 인근 보조경기장 체육행사 시 배드민턴 용도 등 소규모 경기장 필요

- 탄성포장재(15mm) 포설

- 부대시설 : 라인마킹, 네트 지주대, 표지판, 심판좌석 등

- 펜스설치 : 높이 4m 이상 (비상시 차량 이동로 확보 위한 이동식)

- 부대시설 : 라인마킹, 표지판, 이동식 네트지주대 구매 등

- 배드민턴 교실 운영 또는 사용자 무료이용 등

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	국비	시비	구비	기타
금 액	-	120	-	-
확보/미확보	미확보	미확보	미확보	미확보

□ 세부시설 및 소요예산

(단위 : 백만원)

공 종 별	규모	적용단가	소요 비용	집 행 계 획
				~ 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월 ~
합 계			1억2천								1억 2천
①설 계 비			-
②공 사 비
토목 / 이식	15m × 8m (145㎡)	원/㎡	5천								5천
포장공사	15m × 8m (145㎡)	원/㎡	4천								4천
부 대 시 설	5 ea	원/ea	1천								1천
펜스 등 기타	60m (145 ㎡)	원/m	2천								2천

□ 확충 필요성

○ 잠실종합운동장 내 보조경기장 체육행사 시 소규모 족구장 등 부족

○ 생활체육시설 증설로 잠실종합운동장 활성화 증진

□ 시설부지 현황

○ 주변현황

- 인근에 천연잔디 및 육상트랙 갖춘 보조경기장 1면 등 운동시설 배치

○ 부지현황

- 도로변 녹지대로 수목 10여 그루 식재 중

□ 기대효과

○ 배드민턴 및 족구 동호회 연습 장소부족 해소로 시민 만족도 상승

○ 잠실종합운동장 체육경기 기능 활성화

□ 세부 추진일정

○ 설      계 : ’15. 5. 1. ～ ’15. 5. 31.

○ 착공예정일 : ’15. 6. 1.

○ 준공예정일 : ’15. 9. 30.

※ 첨부 : 현황사진 및 배치도 각1부.

□ 현장사진

□ 배 치 도