문서번호	현장민원과-18992
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	★강서수도사업소장
협 조

2015년 하반기 만기수도계량기 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10월

강서수도사업소

(현장민원과)

2015년 하반기 만기 수도계량기 교체 계획

2016년부터 급격히 증가되는 만기 수도계량기 교체업무를 안정적으로 수행하기 위한, 하반기 수도계량기 교체계획을 수립 시행코자 함.

Ⅰ

일 반 현 황

교체 근거

○ 만기계량기 교체 → 계량에관한 법률 제20조 (검정유효기간)

- 검정유효기간 : 소형 8년, 대형 6년 (수도자재센터 교체)

⇒ 검정일 이후 8년 도래전 수도계량기 교체

교체인원 : 7명 (기간제 근로자)

○ 담당업무 : 만기교체 및 폐전철거, 겨울철 동파교체

○ 계약기간 : 2015. 7월 ~ 2016. 8월

○ 작업조건 : 주 5일근무, 월 320개~350개/인

년도별 만기교체 수량

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	비 고
만기교체량	21,100	44,650	54,570	43,980

※ 금년 이후 3년간 만기 교체수량 급격히 증가 (금년 대비 210~260%)

《2015년 만기교체 실적 전망》

○ 교체 목표 : 21,100건

○ 9월말 현재 교체량 : 17,623건 (진도율 : 83.5%)

○ 교체 전망

⇒ 금년 남은 작업기간(2개월)동안 교체종사원의 작업량(약 2,300건/월)을 감안할            때 약 22,000건/년 교체할 수 있어 목표달성은 가능할 것으로 사료됨

Ⅱ

향후 예상되는 문제

2016년 이후 만기교체 목표달성 곤란

○ 교체종사원(7명) 년 교체수량 : 21,000개

· 교체원 1인 년간 교체량 : 약 3,000개

→ 작업기간 9개월 (월동기 3개월제외)

→ 월 교체량 : 320개~340개/인

○ 년도별 교체목표 미달 수량

- 2016년도 : 22,600전 (교체대상 44,600, 교체가능 22,000)

- 2017년도 : 32,500전 (교체대상 54,500, 교체가능 22,000)

- 2018년도 : 21,900전 (교체대상 43,900, 교체가능 22,000)

⇒ 향후 3년간 약 77,700전 미교체

Ⅱ

2015년 하반기 이후 교체 계획

2015년 만기분 잔여량 교체

○ 미교체 잔량 : 5,000전 (9월말 현재)

○ 작업 기간   : 2015. 10 ~11월 (2개월)

⇒ 금년 만기 잔여량은 평일 작업 기간내 작업으로 목표달성이 가능

□ 교체 장애수전은 수요가 협의(설득) 후 교체

교체거부 또는 적치물 설치 수전은 수용가 협의(설득) 후 교체작업 재실시

2016년 이후 만기분 교체

《 장기 대책 》

○ 교체종사원 충원 요청 : 본부 계측관리과

- 2016년 교체물량 대비 잉여인력 보유 사업소 교체인력 배정요청

《 단기 대책 》

○ 기간제근로자(교체원) 휴일근무 실시

- 2016년도 교체물량은 금년도 잔여 개월(3개월)동안 주말 휴일근무를        실시하여 교체작업 추진

- 휴일근무 회수 : 월 3 ~ 4회 (일 근무시간 6시간 이내)

- 휴일 근무시 작업목표

· 1인 교체량 : 아파트 30건/ 연립 · 일반건물 20건

【 조견표 】

아파트	연립일반	아파트	연립일반	아파트	연립	아파트	연립
30	0	23~22	5	15	10	8~7	15
29~28	1	21	6	14~13	11	6	16
27	2	20~19	7	12	12	5~4	17
26~25	3	18	8	11~10	13	3	18
24	4	17~16	9	9	14	1~2	19

※ 휴일근무(4회)시 교체량 → 아파트 800개, 연립, 일반주택 560개

(단, 기간제근로자 전원 동의하에 추진)

○ 월동기 기간 만기 교체작업 실시 (12월, 1월, 2월)

- 월동기 기간에도 교체작업 여건이 고려, 동파영향이 없는 단지 만기교체 시행

Ⅳ

행 정 사 항

기간제근로자 휴일근무 시행

○ 시행일 : 2015. 10. 17일 이후 ~

※ 기간제근로자의 휴일(연장)근무 동의서 확보

본부 계측관리과 보고

○ 2016년 사업소 기간제 교체원 충원 요청

따로붙임 : 휴일 연장근무 동의서 7매