문서번호	운영과-470
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		한강사업본부장
협 조
	총무과장
	환경과장
	공원기획과장
	시설관리과장

2015년 한강 여름캠핑장 조성․운영 기본계획

2015.  1.

한강사업본부

(운영부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년 여름 캠핑장 조성·운영 기본계획

여름철 방문객이 많은 한강공원 잔디밭에 캠핑장을 설치하여 시민이 휴가를 즐길 수 있도록 운영하고자 함

□ 법적 근거

○ 하천법 제46조, 서울특별시 고시 제2974호(‘10. 4.29)

○ 서울특별시 고시 제251호(‘14. 7.3)

□ 운영 기본방향

○ 편리한 접수를 통한 시민 불편 최소화 및 야영 공간은 최대한 확보

○ 야영은 허용하되 자연환경 보전을 감안한 제한적 취사행위 허용

○ 캠핑장에 필요한 시설을 적재적소에 배치하여 시민 만족도 제고

○ 안전한 캠핑장이 되도록 대책 수립, 매뉴얼 작성, 운영체계 확립

□ 2014년 추진실적

○ 참여인원 : 10,232동 / 48,973명

구 분		계	뚝섬	잠실	잠원	여의도
총 동수(a)		17,500	3,700	3,200	3,200	7,400
예 약	동수(b)	12,374	3,291	2,115	1,912	5,056
	인원수	61,155	16,455	10,515	9,620	24,565
예약률(b/a)		71%	89%	66%	60%	68%
입 실	동수 (c)	10,232	2,806	1,674	1,519	4,233
	인원수	48,973	13,507	8,055	7,254	20,157
예약동수 대비 입실률(c/b)		83%	85%	79%	79%	84%
총 동 수 대비 입실률(c/a)		58%	76%	52%	47%	57%

※ 임시휴장(2일) : ’14. 7.26(토) <뚝섬, 잠실, 잠원>,  8. 3(일) <전체>

○ 캠핑장별 이용실태

- 뚝섬의 경우 강북에 위치하고 전철역이 인근에 있어 대중적인 캠핑을 즐기기에 적합하여 4개 캠핑장 중 이용실적이 가장 높음

- 잠실․잠원의 경우 ‘14년도에 처음 오픈되어 인지도가 낮고 교통 불편 등 강남지역 주민은 잘 이용하지 않아 이용실적이 낮음

- 여의도의 경우 캠핑장 내 수목 그늘이 없어 이용하기 불편하여 실적 낮음

○ 시민 및 언론반응

- 편의시설(샤워실, 화장실, 간이매점, 바비큐시설 등)이 충분이 설치되어 쾌적하고 편리하게 캠핑을 할 수 있어 좋은 반응

- 기자들이 참여한 리허설(’14.7.18, 여의도)에서 ’13년보다 많이 개선되었다는 의견이 대다수였음(운영기간 동안 비판기사가 1건도 없음)

- 언론보도 건수 : 100여건(주요 방송 및 신문)

○ 프로그램 운영 – 10개 프로그램 50,230명 참여

- 휴대폰 충전기 무료대여, 모기약 뿌려주기, 홍초 시음 서비스

- 한밤의 팝페라, 한여름밤의 추억만들기, 영화 상영 등

□ 2015년 추진계획

○  운영개요

- 운영기간 : ‘15. 7.20(월) ~ 8.20(목) <31일>

※ 2015년 행복몽땅프로젝트 확정시 일정 변동 가능

․ 운영시간 : 15:00~익일 11:00(1박2일)

․ 일상적 우천시에는 운영(단, 악천후, 태풍, 침수 예상시 퇴영)

- 사업비 : 750백만원(시설비 : 600, 사무관리비 150)

- 대상지(규모) : 5개 공원 5개소(530개동)

공원명	위 치	면 적	동 수
뚝 섬	청담대교 상류 잔디밭	18,800㎡	100동
잠 실	잠실대교 하류 잔디밭	8,620㎡	100동
잠 원	한남대교 하류 잔디밭	8,280㎡	80동
여의도	마포대교 하류 너른들판	29,300㎡	200동
양 화	양화대교 하류 장미단지	2,600㎡	50동

※ 신규 운영장소를 검토 한바 최종 후보지 양화, 이촌공원 중 임시주차장(양화축구장) 확보가 가능한 양화지역에 소규모(50동) 운영하고자 함

- 추진방법

․ 캠핑장 조성 및 기반시설 설치 : 한강사업본부에서 설치

․ 캠핑장 관리․운영 : 민간 운영사에서 추진

○ 기본계획 수립 및 운영사 공개모집공고(‘15. 1월)

- 캠핑장 부지 및 부서별 추진사항 확정․통보

- 운영사 모집은 공개모집(협상에 의한 계약)하여 문호 적극개방

○ 운영업체 선정 및 계약 체결(‘15. 2월)

- 연초에 미리 선정하여 캠핑장 준비에 차질이 없도록 충분히 기간 부여

○ 텐트 협찬 추진(‘15. 2월말~4월초)

- 운영사 책임하에 텐트 협찬 추진

- 텐트는 아웃도어 회사에서 서울시 기부 또는 제공 후 회수 선택

○ 세부 운영계획 수립(‘15. 4월)

- 캠핑장 설계 및 텐트 배치계획, 인력 배치계획, 홈페이지 내용, 예약방법, 이용료, 운영 프로그램 등

○ 텐트 및 데크 제작(‘15. 4~5월)

- 텐트 규격 확정 후 제작

○ 대학생 아르바이트생 지원 요청(‘15. 5~6월)

- 텐트 설치, 철거, 시민 안내, 각종 부대작업 등에 필요

- 한강 실정상 긴급하게 텐트를 설치․철거할 사태가 빈번히 발생하므로 필요한 인력을 적기에 공급할 수 있는 상시 지원시스템 필요

○ 각종 기반시설 및 부대시설 설치(‘15. 5~6월)

- 상․하수도, 전기공사 등

○ 텐트 및 데크 시범설치 및 보완작업(‘15. 6월)

- 현장 설치 후 불편사항 발굴 및 개선

○ 캠핑장 홈페이지 개설 및 예약(‘15. 6월)

○ 캠핑장 리허설(‘15. 7.10 이전까지)

- 직원, 기자 등 대상(캠핑장 1개소 선정)

○ 캠핑장 오픈(‘15. 7.20)

□ 부서별 협조사항

○ 현장조사 및 소요예산 파악	: 관련부서

- 화장실․급․하수시설 필요성, 설치장소 및 수량, 소요예산 등

○ 본부 점검 직원 여비 지급 협조	: 총무과

○ 전기․통신 공사	: 총무과

○ 청소, 화장실 설치	: 환경과

○ 캠핑장 이용차량 주차료 할인검토	: 공원기획과

○ 급수, 하수시설, 샤워시설 제작 설치	: 시설관리과

○ 시설물 대피 지원	: 관할 안내센터

□ 소요예산 : 750백만원

○ 사무관리비 150,000천원

- 텐트 구입비 : 300동 × 300,000원 = 90,000,000원

- 안내표지판, 집기 등 부대비용 및 관리비 : 60,000,000원

○ 시설비 600,000천원

- 화장실 임차 : 5,000천원 × 12개소 = 60,000천원

- 샤워시설 제작 : 30,000천원 × 10개소 = 300,000천원

- 울타리 제작설치 : 20,000천원 × 5개소 = 100,000천원

- 데크 설치 : 100천원 × 600개 = 60,000천원

- 상․하수도 공사, 음수대, 캠프파이어존 설치 : 40천원 × 2개소 = 80,000천원