	월간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.1	사업명	‘14 건설정보관리시스템(One-PMIS) 유지관리 및 기능고도화용역	작성부서	용역팀

▪ 사 업 명 :	‘14 건설정보관리시스템(One-PMIS) 유지관리 및 기능고도화용역
▪ 사업총기간 :	2014. 3. 07 ~ 2015. 03. 6 (12개월)
▪ 상 세 일 정 :	단위사업별 일정표 (붙임) 참조
▪ 월간보고기간 :	2015. 01. 01 ~ 2015. 01. 31
▪ 공 정 현 황 :	계획 97.546% / 실적 95.127%

○ 추진업무
분야	업무명	기간	비고
유지보수	흙은행의 국토부 「토석정보공유시스템」 통합 활용	‘14.12.01 ~ ‘15. 2. 6	‘15.2.2일자 통․폐합
	정보소통광장 전자문서 정보연계	‘14.11.10 ~ ‘15. 2.13	연계관련 테스트 진행중
	타 기관 PMIS 연계	‘14.11.17 ~ ’15. 2.13	대상기관 : SH공사 설계(안) 작성
	웹호환성보기설정 개선	‘14.12.22 ~ ‘15. 2.13	PC별 웹브라우져 환경설정 불편 개선
	플러그인설치과정 개선	‘14.12.22 ~ ‘15. 2.25	PC별 웹브라우져 환경설정 불편 개선
	주요페이지 로그인 및 개인정보 수정 등 SSL적용 부분 확정 및 일부페이지에 SSL 적용	‘14.12.22 ~ ‘15. 2.13	서버용 범용 공인인증서 설치완료
공통	사용자 교육, 웹디자인 개선(PMIS, 건설알림이)	‘14. 6. 1 ~ ‘15. 1.31	메뉴별 디자인 수정

○ 신규개발 및 기능보완 완료 업무
분야	업무명	기간	비고
기능 고도화	이력관리, 사업단계 수행실적 평가(2단계)시스템 구축	‘14.09.30
	게시판 기능개선(솔류션 구매·설치 및 기능최적화)	‘14.12.31	시스템 적용완료
	안전점검관리시스템 신규구축 및 추가개발	‘14.09.30	일별 점검결과서 메일링보고, 공사현장현황 등
	국토부키스콘(KISCON)정보활용	‘14.09.30
	건설소식지 생성·발송 절차 개선	‘14.11.28
	건설알림이 내 추진이력 공개 추가	‘14.09.19
	건설관련 업무지침 관리 및 공유 개발	‘14.11.28	기술심사담당관 재협의 추진
	웹카메라 설치현황 관리기능 구축	‘15.01.31	프로그램 구현완료 및 테스트
유지보수	1. 사업및사용자관련 (G2B로 사업자동생성 등) 2. 사업연결 및 등록(감독원), 사업개요 3. 사용자신청(with LDAP) 화면 리뉴얼 4. 업체등록신청(사업자등록증) 및 확인(게시판)	‘14.07.04	-공정보고(장·단기사업)방법간소화 -사업자(계약업체정보)등록절차간소화 -로그인절차개선다양화 -모수관리
	첫화면리뉴얼 1. 메인화면 변경, 통합검색 기능 3. 도시철도국 요구사항 검토 및 반영	‘14.08.29	-첫화면메뉴 -권한관리
	자치구별 맞춤건설알림이서비스 제공	‘14.12.12	25개 자치구별 건설알림이 검색기능 제공
	건설알림이 GIS 공사정보표기방법 및 검색속도개선	‘14.12.12	사업별 팝업상세보기 기능, 속도, 디자인 개선
	새주소 우편번호 검색 개선	‘14.05.30	도로명주소안내시스템 주소정보연계
	게시판기능 보완개발	‘14.06.20	공지게시판추가기능개발, 웹에디터적용
	웹카메라 관리 기능 보강	‘14.07.31	ocx별 화면 개발
	예정공정관련 오류및 기능개선	‘14.07.31
	데이터 정합성 (계약/ 집행/ 하도급, 공정/자원 등)	‘14.07.11
	웹카메라 통합모니터링 기능 추가	‘14.09.30	벤더 회사와 협의 후 진행
	타 기관 PMIS 연계 (상수도사업본부)	‘15.01.31	사업개요 정보 매일 자동수신
	건설알림이 페이지별 활용건수 관리	‘14.11.24	서울시 웹로그분석시스템 활용
	공사별 관리상태 평가메뉴 추가 및 결과서 공개	‘15. 1. 8

월간업무현황보고서

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
웹카메라 설치현황 관리 개발	▪ 프로그램 분석/설계/구현/테스트 - 설치위치 정보 및 설치현장 사진등록 - 촬영영상 오류관리 이력 - 오류발생 현장안내문자메세지발송관리 - 공사장별 설치현황 조회 ▪ 적용완료		▪ 프로그램 분석/설계/구현/테스트 - 설치위치 정보 및 설치현장 사진등록 - 촬영영상 오류관리 이력 - 오류발생 현장안내문자메세지발송관리 - 공사장별 설치현황 조회 ▪ 적용완료
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
공사별 관리상태 평가메뉴 추가	▪ 공사별 관리상태 평가 프로그램개발 완료 및 시스템 적용 완료 - 공종관리 평가 - 공정관리 평가 - 사업개요 평가 - 마이페이지 평가 - 계약연결여부 평가 - 수행실적 평가 - 시스템 활용 평가 - 시스템 접속 평가		▪ 공사별 관리상태 평가 프로그램개발 완료 및 시스템 적용 완료 - 공종관리 평가 - 공정관리 평가 - 사업개요 평가 - 마이페이지 평가 - 계약연결여부 평가 - 수행실적 평가 - 시스템 활용 평가 - 시스템 접속 평가		▪
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
흙은행의 토석정보공유시스템 활용	▪ 흙은행 내 ‘토석정보공유시스템“ 활용 안내 팝업 설계/적용		▪ 흙은행 내 ‘토석정보공유시스템“ 활용 안내 팝업 설계/적용
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
‘전자문서’ 전면개편	▪문서번호 개편관련 기능보완 적용		▪ 문서함 검색 조건 수정 ▪ 업무지시전 문서번호 생성 기안전송 시로 변경
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
건설소식지생성/ 발송 기능개선	▪ 디자인 개선에 따른 화면개발 완료 - 소식지 메일링 기능 - 소식지 수신확인 기능 - 소식지 수신거부 기능 - 소식지 메일대상자 엑셀 추가삭제		▪ 디자인 개선에 따른 화면개발 완료 - 소식지 메일링 기능 - 소식지 수신확인 기능 - 소식지 수신거부 기능 - 소식지 메일대상자 엑셀 추가삭제 ▪ 소식지 공정율이 없는 사업은 공정율 표시 하지 않도록 수정
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
정보소통광장 연계	▪ 정보소통광장 연계 개발		▪ 정보소통광장 연계(안) 에 따른 기 능개발 회의 및 데이터베이스 연결 테스트		정보소통광장 연계(안) 에 따른 기 능개발 완료
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
업무추진현황 책자 기조제작 지원	▪ 샘플 책자를 활용한 내부의사 결정 (기획예산과) 대기		▪ 샘플 책자를 활용한 내부의사 결정 (기획예산과) 대기
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
타기관 PMIS연계	▪ SH공사와 업무 협의에 따른 모듈 설계(계속)		▪ SH공사와 업무 협의에 따른 모듈 설계 (계속) - SH공사 연계(안) 작성 - 인터페이스 구조도 작성		▪ SH공사와 연계완료(예정)
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
기존 기능개선 및 사용자 교육 등			▪ 건설알림이 디자인변경 소스지원 - 모바일건설알림이 화면 - 플래쉬 변경(공통) - 건설알림이 건물번호
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
웹호환성, 플러그인설정개선, SSL 적용	▪ 웹호환성 설정없이 PMIS 활용가능 테스트 및 실무 적용 ▪ 플러그인 설정 절차 간소화를 위한 기능 수정(계속) ▪ SSL(보안) 적용 개발(계속)		▪ 웹호환성 설정없이 PMIS 활용가능 테스트 및 실무 적용 ▪ 플러그인 설정 절차 간소화를 위한 기능 수정(계속) ▪ SSL(보안) 적용 개발(계속)		▪ 웹호환성 설정없이 PMIS 활용가능 테스트 및 실무 적용 ▪ 플러그인 설정 절차 간소화를 위한 기능 수정(계속) ▪ SSL(보안) 적용 개발(계속)
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

월간 업무 현황 보고서( 2015년 01월 )

단위과제	금월실적(2015.01.01 ~ 2015.01.31)				차월계획(2015.02.01 ~ 2015.02.28)
	계 획		실 적		내 용
디자인 수정	▪ 건설알림이 내 검색창 신 디자인 적용 ▪ 디자인 수정(계속) - 도면도서관리 - 사업연결, 등록신청, 신규사용자 아이디 발급 신청 - 처음사용자 안내, 아이디/비번 찾기 화면 - 통합검색-현장사진 - 건설알림이-현장사진 - 건설알림이 메인 - 흙은행 중단안내 팝업디자인		▪ 건설알림이 내 검색창 신 디자인 적용 ▪ 디자인 수정(계속) - 도면도서관리 - 사업연결, 등록신청, 신규사용자 아이디 발급 신청 - 처음사용자 안내, 아이디/비번 찾기 화면 - 통합검색-현장사진 - 건설알림이-현장사진 - 건설알림이 메인 - 흙은행 중단안내 팝업디자인
미결업무 및 대책	내 용			대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용