문서번호	급수운영과-22665
결재일자	2015.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
협 조
	시설관리과장
	주무관
	주무관
	주무관

2015년 12월(최종)

상수도관 정비공사 추진 실적 보고

2015.  12.  31.

강동수도사업소

(급수운영과)

2015년 12월(최종)

상수도관 정비공사 추진 실적 보고

′15년 12월 노후상수도관 정비 최종 추진 실적 결과를 보고 드림.

[관련근거]

- 2015년도 성과관리계획 확정에 따른 시스템 력 및 평가자료 제출   : 기획예산과-4857(′15.06.03)

- 2015년 노후 배급수관 정비공사 추진계획 알림     : 누수방지과-367(′15.01.15)

- 2015년 노후 송배수관 정비사업 대상선정 통보     : 배수과-23(′15.01.03)

현 황

□ 목 표  : 9.1㎞  (사업비 : 11,205백만원)

(단위: ㎞, 백만원)

구 분		계	송파구	강동구	비 고
계	정비연장	9.1	3.65	5.45	단위사업 8건
	사업비	11,205	4,228	6,977	당초 11,436
송배수관정비	정비연장	2.6	0.4	2.2	단위사업 4건
	사업비	6,369	1,810	4,559	당초 6,200
배급수관정비	정비연장	6.5	3.25	3.25	단위사업 4건
	사업비	4,836	2,418	2,418	당초 5,236

추진실적

□ 12월말 현재 정비실적 : 9.461㎞(송배수관 2.881, 배급수관 6.580㎞)

구 분	계	송배수관			배급수관			비 고
		소계	송파	강동	소계	송파	강동
정비목표	9.100	2.600	0.400	2.200	6.500	3.250	3.250
실적누계	9.461	2.881	0.400	2.481	6.580	3.300	3.280
정비율(%)	103	111	100	112	101	101	101
12월실적	-	-	-	-	-	-	-
11월누계	9.461	2.881	0.400	2.481	6.58	3.300	3.280

- 단위 공사 8건(송배수관 4건, 배급수관 4건)

□ 월별 추진 현황

구 분	1~4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
목 표(㎞)	0.4	2.4	5.4	6.0	7.0	8.1	8.8	9.1	결과보고	누계
(계획율)	(10%)	(30%)	(60%)	(66%)	(77%)	(89%)	(96%)	(98%)	(100%)
실적(㎞)	-	0.8	2.2	3.4	5.3	7.9	8.7	9.4	완료	누계
(추진율)	(10%)	(29%)	(41%)	(57%)	(76%)	(98%)	(98%)	(103%)	완료

□ 예산 집행 현황

구 분	예산액	집행율	집행액				낙찰차액	집행잔액	비 고
			계	도급비	자재비	이설비 등
합 계	11,205	94.0	10,536	4,307	2,813	3,416	629	40
송배수관	6,369	92.9	5,919	2,667	1,830	1,422	450	-
배급수관	4,836	95.5	4,617	1,640	983	1,994	179	40

붙임 : 공사별 추진내역 1부. 끝.