천호대로 중앙버스전용차로 확충 및 도로확장

천호대로 광나루역 ~ 아차산역 구간중 일부 미집행된 병목구간(6차로→10차로)을 확장하여 강북지역의 교통편익을 증진하고, 천호대로로 인해 단절된 아차산의 녹지축을 연결하여 시민의 행복공간을 창조하기 위한 사업임

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
10,000	10,600	25,897	15,297	144%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
중앙버스 전용차로 연장 (900m)	100% (350m)	100% (80m)	100% (75m)	100% (75m)	100% (125m)	연차별 조성계획	실공사물량

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○ 도로 확장 : 장기 미집행 도시계획시설(도로)의 시행에 따른 민원해소 및 간선도로 병목구간 확장을 통한 교통편익 증진

○ 녹지축 연결 : 아차산의 단절된 구간을 연결하여 현재 시행중인 구의간이 야구장 및 주변   공원과 연계하여 시민의 행복지수 증진

□  사업근거

○  법령상 근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 타당성조사 및 기본계획용역 완료

□  사업내용

○  지원대상 : 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역 ~ 광나루역)

○  규    모 : 6차로(28m) → 10차로(48m), 연장=900m

○  사업기간 : 2007.03. ~ 2015.12.

- 도로확장 : 6차로(28m) → 10차로(48m), 연장=900m

․ 지하차도 신설: B=48m, L=260m,  U-Type 옹벽: B=48m, L=320m

- 용지보상 : 19,246㎡

- 감리용역 : 2010.11. ~ 2015.12.

○  총사업비 : 80,933백만원

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역 ~ 광나루역)

○  사업규모 : 6차로(28m) → 10차로(48m), 연장=900m

- 도로확장 : 6차로(28m) → 10차로(48m), 연장=900m

․ 지하차도 신설: B=48m, L=260m,  U-Type 옹벽: B=48m, L=320m

- 용지보상 : 16,463㎡

- 감리용역 : 2015.01. ~ 2015.12.

○  소요예산(안) : 25,897백만원

□  추진경위

○  2007.03. ∼ 2007.11. : 타당성 조사

○  2008.10. ∼ 2009.11. : 기본계획

○  2008.10. ∼ 2010.05. : 실시설계 용역

○ 2010.10. ∼ 현재 : 토지 및 지장물 보상, 공사착수 및 진행중(‘14.7월 공정율 : 52%)

□  2015년도 예산(안)(단위 : 백만원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		10,000	10,600	25,897	15,297
	시설비	9,434	8,487	23,225	14,738
	토지매입비	-	1,547	1,375	-172
	감리비	542	542	1,291	749
	시설부대비	24	24	6	-18

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 공사비

‧ 토공 : 30,000㎥×38.510천원 = 1,155,305천원

‧ 구조물공(지하차도) : 580m×5388.231천원 = 3,125,174천원

‧ 배수및옹벽공 : 500m×1444.292천원 = 722,146천원

‧ 포장 : 526,347천원x1식 = 526,347천원

‧ 관급자재 : 7,397,600천원x1식 = 7,397,600천원

‧ 기타(제경비, 데크, 벽천, 폐기물, 전기설비 등) : 10,298,428천원x1식 = 10,298,428천원

‧ 보상비 : 1,375,000천원x1식 = 1,375,000천원

￭ 용역비

‧ 감리비 : 1,291,000천원x1식 = 1,291,000천원

￭ 기타(시설부대비)

‧ 시설부대비 : 6,000천원x1식 = 6,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성→공사계약(서울시-시공업체)→공사시행→사업완료

○  계약체결

- 장기계속공사, 공동도급

- 제한입찰(시공능력공시액)

- 관리감독 : 책임감리

□  사업효과

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2011년도	‧ 문화재 표본,시굴,발굴조사 ‧ 도로점용공사장 교통소통대책자문협의(경찰청 규제심의 협의)
2012년도	‧ 노후 상수관로 이설공사(A LINE) 완료 ‧ 가설교량 개통(기존고가교 철거)
2013년도	‧ 노후 상수관로 이설공사(B LINE,직관) 완료 ‧ 지하차도 구조물(12SPAN,좌측) 완료
2014년도	‧ 노후 상수관로 부단수천공(B LINE) 진행중 ‧ 지하차도 구조물(13SPAN,좌측) 진행중

○  향후 기대효과

- 도로확장으로 교통 지․정체 해소, 녹지축 조성으로 서울 부도심부 생태축 복원

- 주변 고대・근대 역사 유물과 구의 간이야구장 등 접근성 개선

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○				○
심의 일자	2009.04				2009.10

<사전절차 이행결과>

○  특이사항 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

‧ 주민설명회 총3회 개최(2011.03.10, 2013.05.08, 2014.02.20)

-사업 추진경과 및 계획 등 인근주민에게 사업설명회 개최

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 3~5단계별 교통전환 및 토공작업

- 단계별 교통전환에 따라 지하차도 구조물 시공(우측,중앙)

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015.03~2015.12	25,897
토공 및 3~5단계 교통전환	2015.03~2015.10	1,155	STA.0+000~0+900
구조물공(지하차도)	2015.04~2015.12	3,125	STA.0+220~0+780우측,중앙
배수 및 옹벽공	2015.03~2015.11	722	STA.0+000~0+900좌우측
포장공	2015.03~2015.12	526	STA.0+000~0+900좌우측,중앙
관급자재	2015.03~2015.12	7,398	아스콘,레미콘 외
기타	2015.03~2015.12	12,971	제경비,데크,벽천,폐기물,전기설비,보상비,용역비,시설부대비

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		80,933	37,469	10,600	25,897	6,967
시설비		74,222	23,943	8,487	23,225	18,567
	기본 및 실시설계비	1,955	1,814	-	-	141
	보상비	1,710	10,168	1,547	1,375	△11,380	투융자심사
	기타(감리비,부대비)	3,046	1,544	566	1,297	△361	투융자심사

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구 분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최 초	2009	80,933	-	2010	2013
2015년도 요구	-	80,933	99,863	2010	2015	보상비 증가 외

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	-	26,530	14,337	-	12,193
2012	6,500	-	-	6,500	6,446	-	54
2013	10,000	-	-	10,000	9,985	-	15
2014	10,600	-	-	10,600	-	-	-

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○ 해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당없음

□  중기재정소요 및 산출근거

○  해당없음

실․국	부서명	담당자
도시교통본부	교통운영과	중앙차로팀장	(2133-2471)		(2133-2475)

참 고 자 료

□  위치도

□  조감도

□  공사계획평면도

□  단계별 교통처리계획