2015년 BSC 핵심사업 개요

□ 주요사업명 : 노후 상수관 정비

□ 사업목적

내구연한 경과로 누수 및 녹물발생의 원인이 되는 노후상수관을 교체하여 수질오염을 방지하고 최적의 관망환경 조성

□ 목  표 : 9.1㎞(사업비 114억원)

❍ 송배수관 정비공사(400mm이상) : 4건, 2.6㎞(사업비 62억원)

❍ 배급수관 정비공사(350mm이하) : 4건, 6.5㎞(사업비 52억원)

□ 목표대비 예상달성률(%)

❍ 1/4분기 예상달성률 : 5% (계약 및 착공준비)

❍ 2/4분기 예상달성률(누적) : 60%

❍ 3/4분기 예상달성률(누적) : 90%

❍ 4/4분기 예상달성률(누적) : 100%

□ 사업추진상 문제점

❍ 시민의식의 향상에 따른 각종 공사관련 불편 민원 증가

❍ 꾸준한 사업추진으로 정비대상이 간선도로나 굴착하기 어려운

부분만 남아 사업추진이 어려움

❍ 포장복구 민원 증가에 따라 공사에 소요되는 비용보다 포장복구에

소요되는 예산이 증가하게 되어 전체적인 사업예산 증가

□ 기타

❍ 공사장 현장점검 강화(특별점검, 일일점검) 및 공사 관리자

대상 주기적인 안전교육 실시로 선제적인 안전사고 예방