2015년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(동부수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 8.1km, 6,489백만원(본부확정)

○ 당초 배급수관 발주계획(5건)

연번	공 사 명	공사개요			심사결과
		구경(㎜)	연장(m)	사업비 (백만원)
계 : 5건		150~300	8,100	6,489
1	중곡동253번지 외 4개소 배급수관정비공사	150	875	723	- 내식성관은 사업대상에서 제외하고 대체구간 재선정하여1km이상으로 발주
2	자양동796번지 외 1개소 배급수관정비공사	150	975	803	- 내식성관은 사업대상에서 제외하고 대체구간 재선정하여km이상으로 발주
3	용답동 226번지외 1개소 배급수관정비공사	150	1,800	1,400	- 원안시행하고 D300mm, L400m추가반영
4	장안동369번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1,850	1,650	- 원안시행하고 단절관지점 순환배관망 형성
5	용두동외39번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1,610	1,250	- 원안시행하고 단절관지점 순환배관망 형성
연간단가 시행		80~300	990	663

연번	공 사 명	공사개요			조치사항
		구경(㎜)	연장(m)	사업비 (백만원)
계 : 4건		150~300	8,100	6,489
중곡동253번지 외 4개소 배급수관정비공사		사업취소			- 굴착통제 및 사업연장구간 부족으로 사업취소하고 자양동796번지외2 개소 공사에 L840m추가
1	자양동796번지 외 2개소 배급수관정비공사	150~300	2,050	1,642	- 설계도면 심사완료(L840m추가)
2	용답동 226번지외 2개소 배급수관정비공사	150~300	2,000	1,602	- 설계도면 심사완료
3	장안동369번지외 1개소 배급수관정비공사	200~300	1,800	1,442	- 설계도면 심사완료
4	용두동39번지외 3개소 배급수관정비공사	200~300	1,670	1,346	- 설계도면 심사완료
연간단가시행		80~300	580	457

○ 변경 배급수관 발주계획(4건)