2015 노후상수도관정비 현황

Ⅰ		상수도관 추진 현황

강동수도사업소                                      1~7월

연번	공 사 명	공사기간	공사개요		추진내역		비 고
			구경 (㎜)	연장 (m)	실 적	공정율
계	총계 (8건)		80 ~1,000	9,100	3,355	47.1%
	(중계)송배수관		300 ~1000	2,600	110	15.3%
1	마천동5-16~거마가압장간송배수관	′15. 7.18~ ′16. 1.17	1,000	400	･ 강관 투과시험 완료 ･ 도로복구비 납부	10.5%	횡단굴착 5개소 시행중
	소계(시설관리과)		300 ~800	2,200	110	20.1%
2	명일동46-4~48-17간외 1개소송배수관	′15. 5.20~ 9.10	300 ~400	650	･ 관부설 : 110m ･ 횡단굴착	38%
3	상일동 산66~121-1간송배수관	′15. 5.18~ 10.26	700	780	･ 횡단굴착	5%	발주 816
4	명일동 309-1~44번지간 송배수관	′15. 5.11~ 11. 4	800	770	･ 횡단굴착 ･ 관급자재 출고	5%	발주 1,114
	(중계)배급수관		80 ~300	6,500	3,245	50.9%
	소계(급수운영과)		80 ~300	3,250	1,335	46.1%
5	가락동154-17~139번지외4개소배급수관	′15. 4.20~ 10. 4	80 ~300	1,139	1,080	94.8%	발주 1321
6	잠실본동 305번지외5개소 배급수관	′15. 4.15~ 10. 8	80 ~200	1,483	･ 횡단굴착 ･ 관급자재 출고	5.0%	발주 1621
7	송파구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	628	255	40.6%
	소계(시설관리과)		80 ~300	3,250	1,910	58.8%
8	성내동416-7~449-13번지외4개소배급수관	′15. 4.23~ 10. 2	80 ~300	1,330	700	52.6%	발주 1,330
9	고덕동 668~646번지외4개소 배급수관	′15. 4.23~ 10.25	80 ~300	1,510	1,060	70.2%	발주 1,510
10	강동구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	410	150	36.6%