2015 노후상수도관정비 현황

Ⅰ		상수도관 추진 현황

강동수도사업소                                      1~12월

연번	공 사 명	공사기간	공사개요		추진내역		비 고
			구경 (㎜)	연장 (m)	실 적	공정율
계	총계 (8건)		80 ~1,000	9,100	9,461	103%
	(중계)송배수관		300 ~1000	2,600	2,881	110%
1	마천동5-16~거마가압장간송배수관	′15. 7.18~ ′16. 1.17	1,000	400	･ 관부설 : 400m	100%	준공(12.24)
	소계(시설관리과)		300 ~800	2,200	2,481	112%
2	명일동46-4~48-17간외 1개소송배수관	′15. 5.20~ 9.10	300 ~400	650	･ 관부설 : 653m	100%	준공(9.10)
3	상일동 산66~121-1간송배수관	′15. 5.18~ 11.15	700	780	･ 관부설 : 751m	100%	준공(11.15)
4	명일동 309-1~44번지간 송배수관	′15. 5.11~ 12.11	800	770	･ 관부설 : 1,077m	121%	준공(12.11)
	(중계)배급수관		80 ~300	6,500	6,580	101%
	소계(급수운영과)		80 ~300	3,250	3,300	101%
5	가락동154-17~139번지외4개소배급수관	′15. 4.20~ 10. 4	80 ~300	1,139	･ 관부설 : 1,122m	100%	준공(9.21)
6	잠실본동 305번지외5개소 배급수관	′15. 4.15~ 10. 8	80 ~200	1,483	･ 관부설 : 1,441m	100%	준공(10.8)
7	송파구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	628	･ 관부설 : 737m	117%	준공
	소계(시설관리과)		80 ~300	3,250	3,280	100%
8	성내동416-7~449-13번지외4개소배급수관	′15. 4.23~ 10. 20	80 ~300	1,330	･ 관부설 : 1,350m	100%	준공(10.20)
9	고덕동 668~646번지외4개소 배급수관	′15. 4.23~ 9.25	80 ~300	1,510	･ 관부설 : 1,511m	100%	준공(9.23)
10	강동구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	410	･ 관부설 : 419m	102%	준공