2015 노후상수도관정비 현황

Ⅰ		상수도관 추진 현황

강동수도사업소                                      1~9월

연번	공 사 명	공사기간	공사개요		추진내역		비 고
			구경 (㎜)	연장 (m)	실 적	공정율
계	총계 (8건)		80 ~1,000	9,100	7,911	87%	9월목표 8.1㎞
	(중계)송배수관		300 ~1000	2,600	2,123	82%
1	마천동5-16~거마가압장간송배수관	′15. 7.18~ ′16. 1.17	1,000	400	･ 관부설 : 185m	46%	관부설 및 밸브설치
	소계(시설관리과)		300 ~800	2,200	1,938	88%
2	명일동46-4~48-17간외 1개소송배수관	′15. 5.20~ 9.10	300 ~400	650	･ 관부설 : 653m	100%	준공
3	상일동 산66~121-1간송배수관	′15. 5.18~ 10.26	700	780	･ 관부설 : 550m	71%	공사 중 발주 816
4	명일동 309-1~44번지간 송배수관	′15. 5.11~ 11. 4	800	770	･ 관부설 : 735m	96%	공사 중 발주 1,114
	(중계)배급수관		80 ~300	6,500	5,788	89%
	소계(급수운영과)		80 ~300	3,250	2,837	87%
5	가락동154-17~139번지외4개소배급수관	′15. 4.20~ 10. 4	80 ~300	1,139	･ 관부설 : 1,122m	100%	준공 발주 1321
6	잠실본동 305번지외5개소 배급수관	′15. 4.15~ 10. 8	80 ~200	1,483	･ 관부설 : 1,370m	93%	공사 중 발주 1621
7	송파구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	628	･ 관부설 : 345m	55%	공사 중
	소계(시설관리과)		80 ~300	3,250	2,951	91%
8	성내동416-7~449-13번지외4개소배급수관	′15. 4.23~ 10. 2	80 ~300	1,330	･ 관부설 : 1,290m	93%	공사 중 발주 1,330
9	고덕동 668~646번지외4개소 배급수관	′15. 4.23~ 10.25	80 ~300	1,510	･ 관부설 : 1,511m	100%	준공 발주 1,510
10	강동구관내 상수도공사(장기계속 단가계약)	′15. 1.01~ 12.30	80 ~300	410	･ 관부설 : 150m	37%	공사중