[별지1] 심의요청서 양식

사업계획변경조정위원회 심의요청서

건 명	다목적 체육시설 설치 건 (응봉교 확장 및 성능개선공사)

요청기관명	서울시 도시기반시설본부(토목부)
요청연월일	2015년 6월 일

첨부 : 공사중 사업계획변경 설명서 1부.

[첨 부] 공사중 사업계획변경 설명서 양식
공사중 사업계획변경 설명서
공 사 명	응봉교 확장 및 성능개선공사	요청기관 (사업시행부서)		서울시 도시기반시설본부(토목부)
공사위치	성동구 응봉동 ~ 성수동 (기존 응봉교 구간 시점부)
공사기간	2008.10 ~ 2015.12
용역기간
공사금액	총공사비 : 65,156,952천원 계약금액 : 46,455,465천원 관급금액 : 18,701,487천원		금회 증액 공사비 :		1,140,000천원
보상금액	-		금회 증액 보상비 :		-
설계 계약방법	미정		보완설계 용역비용 :		-
사업구분	기타공사
○ 공사개요 • 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m ○ 공사중 사업계획변경 개요 • 다목적 체육시설 설치 (축구장 면, 테니스장 면 ,....
○ 첨부 서류 1. 공사중 사업계획변경 사유서 2. 참여 기술자 및 관련 업체 현황

공사중 사업계획변경 사유서

사업시행 부서 작성자	부서명: 성동구 안전치수과 성 명:	(☏ - )

사업명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사

가. 사업개요

○ 위    치 : 서울시 성동구 응봉동~성수동(기존 응봉교 구간)

○ 사업기간

- 당초 : 2006.12. ~ 2010.12.31

- 변경 : 2006.12. ~ 2015.12.31

○ 총사업비 : 66,297백만원 (당초 65,157백만원에서 1,140백만원 증가)

항 목	당 초	변 경
계약금액	46,455,465,000	47,595,465,000
관급금액	18,701,487,000	18,701,487,000
총공사비	65,156,952,000	66,296,952,000

<사업규모>

사 업 규 모 (사업량)
당 초	변 경
• 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m	• 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m • 다목적 체육시설 설치 (축구장 면, 테니스장 면 ,....

<사업비 개략내역>

구 분		당 초		변 경		증 감 (백만원)
		산출기초(천원)	금액(백만원)	산출기초(천원)	금액(백만원)
총 계			-		8,893	증8,893
공사비	토목 건축 설비 기타				8,738	증8,738
기타	설계비 감리비	-	-	천원		증
	보상비	-	-	-	-	-
	시설 부대비	-	-	-	-	-

나. 사업계획변경 사유

구분	사업계획변경 주요 내용	변경 사유
	○ 다목적 체육시설 설치 (축구장 면, 테니스장 면 ,....	○

다. 사업계획변경 필요성 및 시급성

○

○

라. 사업계획변경의 적법성 및 관련 계획과의 연계성

○ 사업계획변경의 적법성

-

○ 관련계획과의 연계성

-

○ 자체분석결과(성동구 및 사업부서 의견)

-

마. 사업계획변경 추진에 따른 제약요인 및 재원조달 가능성

○ 사업추진 제약요인 : 사업비 확보

○ 재원 조달 가능성 : 총사업비 조정 요구

-

사. 설계변경에 따른 보완설계 용역 입찰방법이 경쟁입찰이 아닌 제한입찰, 지명입찰, 수의계약 등에 해당하는 경우

○ 경쟁입찰 불가 사유 :

-

□ 위치도 및 현황사진

□ 다목적 체육시설 설치계획도

참여 기술자 및 관련 업체 현황

□ 설계업체 및 참여기술자 명단

구분	업체명	분야	직급	이름
타당성조사 (기본계획)
설계 (기본 및 실시설계)

□ 시공업체 현황

구분	업체명	비고
주관사	한신공영(주)
참여회사

□ 감리업체 및 참여기술자 명단

업체명	분야	직급	이름