[별지1] 심의요청서 양식

사업계획변경조정위원회 심의요청서

건 명	터널형방음벽 설치 건 (응봉교 확장 및 성능개선공사)

요청기관명	서울시 도시기반시설본부(토목부)
요청연월일	2015년 6월 일

첨부 : 공사중 사업계획변경 설명서 1부.

[첨 부] 공사중 사업계획변경 설명서 양식
공사중 사업계획변경 설명서
공 사 명	응봉교 확장 및 성능개선공사	요청기관 (사업시행부서)		서울시 도시기반시설본부(토목부)
공사위치	성동구 응봉동 ~ 성수동 (기존 응봉교 구간 시점부)
공사기간	2008.10 ~ 2015.12
용역기간	2015. 2 ~ 2015. 6
공사금액	총공사비 : 65,156,952천원 계약금액 : 46,455,465천원 관급금액 : 18,701,487천원		금회 증액 공사비 :		8,738,400천원
보상금액	-		금회 증액 보상비 :		-
보완설계 계약방법	터널형방음벽 설계공모(위탁) 새건축사협회		보완설계 용역비용 :		55,000천원
사업구분	기타공사
○ 공사개요 • 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m ○ 공사중 사업계획변경 개요 • 터널형방음벽 설치 B= 6차로, L=247.5m
○ 첨부 서류 1. 공사중 사업계획변경 사유서 2. 참여 기술자 및 관련 업체 현황

공사중 사업계획변경 사유서

사업시행 부서 작성자	부서명: 토목부 성 명: 강철규	(☏ 3708-2567)

사업명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사

가. 사업개요

○ 위    치 : 서울시 성동구 응봉동~성수동(기존 응봉교 구간)

○ 사업기간

- 당초 : 2006.12. ~ 2010.12.31

- 변경 : 2006.12. ~ 2015.12.31

○ 총사업비 : 88,154백만원 (당초 65,157백만원에서 8,738백만원 증가)

항 목	당 초	변 경
계약금액	46,455,465,000	55,193,865,000
관급금액	18,701,487,000	18,701,487,000
총공사비	65,156,952,000	73,895,352,000

<사업규모>

사 업 규 모 (사업량)
당 초	변 경
• 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m	• 교량확장 및 성능개선 (DB-18 → DB-24) B=4차로→6차로, L=633m • 터널형방음벽 설치 B= 6차로, L=247.5m

<사업비 개략내역>

구 분		당 초		변 경		증 감 (백만원)
		산출기초(천원)	금액(백만원)	산출기초(천원)	금액(백만원)
총 계			-		8,893	증8,893
공사비	토목 건축 설비 기타	토공 81,973m3×25,240원 배수공 730m×119,147천원 구조물공 17,802m2×2,998,640원 포장공 194a×3,180,142원 부대공 307m×2,339,773원 이설및기타공 44m×5,787,695원 제경비 30%×57,129,089천원	2,069 87 53,382 617 718 256 17,139	토공 81,973m3×24,655원 배수공 730m×119,147천원 구조물공 17,802m2×2,915,178원 포장공 194a×3,180,142원 부대공 307m×2,339,773원 이설및기타공 44m×5,787,695원 제경비 30%×57,129,089천원	8,738	증8,738
기타	설계비 감리비	-	-	55,000천원	55	증 55
	보상비	-	-	-	-	-
	시설 부대비	-	-	-	-	-

나. 사업계획변경 사유

구분	사업계획변경 주요 내용	변경 사유
	○ 터널형방음벽 설치 - 규모 : B= 6차로, L=247.5m	○ 응봉교 시점부 지역주민들의 숙원사항으로써, 현장시장실 운영(`13.7.8 현장방문)시 디자인 부서와 협의하여 터널형방음벽 설치토록 검토된 사항에 대하여 디자인심의(`15.4.1) 및 계약심사(`15.6. ) 절차를 거쳐 증가된 사업비(87.4억원) 반영

다. 사업계획변경 필요성 및 시급성

○ 당초 응봉교 확장공사에는 방음벽 설치는 없으나, 지역 주민들이 지속적으로 터널형방음벽 설치를 요구하는 사항으로서, `13.7.8 현장시장실 운영시 소음으로 시민 불편이 예상되므로 디자인 부서와 협의하여 터널형방음벽 설치를 검토토록 함에 따라,

○ 서울시민디자인위원회와 협의(새건축사협의회에 설계공모를 위탁)하여 터널형방음벽에 대한 기본설계 및 디자인 심의(`15.4.1)를 거쳐 `15.6.2 설계를 완료하였으며, 금년 8월말 응봉교 개통 이전에 설치하고자 함.

라. 사업계획변경의 적법성 및 관련 계획과의 연계성

○ 사업계획변경의 적법성

- 응봉교 전체 구간(633m)중 시점부(247.5m)는 아파트, 상가(학원), 광희중학교 등이 인접하여 있어 지역주민들로부터 차량통행 소음 저감을 위한 터널형방음벽 설치를 지속 요구한 사항으로서, 관련규정에 따라 서울시민디자인위원회 심의(`15.4.1)를 득하여 적법함.

○ 관련계획과의 연계성

- 방음시설은 도로(교량) 부속시설로서 관련계획과의 연계성 없슴

○ 자체분석결과(사업부서 의견)

- 지역주민들이 터널형방음벽 설치를 지속적으로 요구한 사항으로서, 서울시민디자인위원회 심의(총 6차)를 거쳐 주변 경관과 조화를 이루도록 설계하였으며, 금년 8월말 개통 이전에 설치하여 시민들의 불편을 최소화 함이 타당함.

- 응봉교 개통 이후에 설치할 경우, 공사중 차량통행 제한으로 시민들의 통행불편 및 추가 공사비 소요됨.

마. 사업계획변경 추진에 따른 제약요인 및 재원조달 가능성

○ 사업추진 제약요인 : 사업비 확보

○ 재원 조달 가능성 : 총사업비 조정 요구

- 금년도 추경예산으로 미 확보시에는 도급자 부담으로 선 시행후 2016년 예산 확보하여 집행

사. 설계변경에 따른 보완설계 용역 입찰방법이 경쟁입찰이 아닌 제한입찰, 지명입찰, 수의계약 등에 해당하는 경우

○ 경쟁입찰 불가 사유 :

- 기본 디자인 설계는 디자인 전문가(새건축사협의회)와 협의하여 설계공모 하였고, 기본설계 및 실시설계는 공모당선자(디아건축)와 도급자(한신공영)가 협업으로 시행하고, 실시설계 도서 검토는 공사감리업체(건화)가 시행하였으며,

- 터널형방음벽에 대하여 별도로 설계발주시 금년 8월말 개통 이전에 설치하기 위한 절대공기가 부족하였음.

□ 위치도 및 현황사진

□ 터널형방음벽 조감도

참여 기술자 및 관련 업체 현황

□ 설계업체 및 참여기술자 명단

구분	업체명	분야	직급	이름
타당성조사 (기본계획)
설계 (기본 및 실시설계)	㈜디아건축사사무소	건축(디자인)	책임기술자	정현아
	㈜디아건축사사무소	건축(디자인)	참여자	임서연
	(주)제일엔지니어링	구조	책임기술자	김원식
	(주)천일기술단	구조	참여자	김기철

□ 시공업체 현황

구분	업체명	비고
주관사	한신공영(주)
참여회사

□ 감리업체 및 참여기술자 명단

업체명	분야	직급	이름
(주)건화	총괄	책임감리원	박승완
“	공무	보조감리원	감상겸
(주)제일엔지니어링	시공	보조감리원	조용백
“	안전	보조감리원	배종도