2015년 센터별 시설비사업 추진현황

□ 추진완료 : 43건                                   2015.8.31현재

센터별	사 업 명	예 산 액 (천원)	계 약 액 (천원)	공 정 율	추진현황	비 고
중랑	#3,4처리장 초침 포기용 배관교체	120,000	93,192	100%	완료
	#3처리장 엔진펌프 분해정비(수리)	150,000	120,583	100%	완료
	#3처리장 종침 슬러지 수집기 부품교체	210,000	168,831	100%	완료
	#2처리장 종합설비동 유입변압기 교체	225,000	147,620	100%	완료
	피뢰설비 시스템 구축공사	237,398	208,741	100%	완료
	주차관제시스템 교체	251,500	203,562	100%	완료
난지	송풍기 분해정비	100,000	85,927	100%	완료
	주변전실 및 슬러지 1처리장 수배전반 교체	480,000	415,163	100%	완료
	공기예열기 튜브 및 내화물 교체	400,000	339,400	100%	완료
	세정감습탑 교체	450,000	372,728	100%	완료
	슬러지소각시설 산기관 교체	400,000	339,400	100%	완료
탄천	#2 슬러지수집기 부품 제조구매설치	480,000	424,837	100%	완료
	#2 생슬러지인발밸브 제조구매설치	120,000	75,437	100%	완료
	원심탈수기 분해정비(수리)	270,000	195,151	100%	완료
	정량펌프 부품구매	200,000	154,121	100%	완료
	슬러지건조시설 배전반 제조구매설치	450,000	359,117	100%	완료
	건조슬러지 배출,냉각이송 컨베이어 제조구매설치	150,000	115,417	100%	완료
	수질자동측정기 및 실험장비 정비(교체)	300,000	223,411	100%	완료
	서울시 민간위탁 물재생센터 외부회계감사 용역	1.000	9,070	100%	완료
서남	2처리장 최초침전지 슬러지수집기 제조구매 설치	480,000	461,601	100%	완료
	제1,2처리장 송풍기 및 고압모터 분해정비	200,000	165,000	100%	완료
	제2처리장 반송·잉여오니 모타펌프 제조구매 설치	480,000	413,255	100%	완료
	1처리장 종침슬러지수집기 구동차륜 외 1종 교체공사	100,000	82,015	100%	완료
	2처리장 소화조 열교환기 제조구매 설치	330,000	273,251	100%	완료
	제2처리장 소화가스 공급배관 개선공사	120,000	53,284	100%	완료
	슬러지소각장 가성소다 탱크 외 10종 교체 정비공사	280,000	170,835	100%	완료
	제2처리장 유입동 수배전반 제조구매 설치	590,000	504,240	100%	완료
	슬러지소각장 건식반응집진기 백필터 제작구매 설치	130,000	98,145	100%	완료
	1처리장 유입동 침사물 저장장치 교체공사	100,000	76,427	100%	완료
	공기조화기 구매 설치	60,000	50,908	100%	완료
	1처리장 소화조 열교환기 제조구매 설치	150,000	118,250	100%	완료
	슬러지소각시설 세정감습탑 제조구매 설치	450,000	366,532	100%	완료
	실험장비 구매 교체	50,000	45,870	100%	완료
	소방설비 교체공사	110,000	92,994	100%	완료
	주요정보통신기반시설 취약점 분석.평가 용역	50,000	42,000	100%	완료
	1처리장 농축기동 슬러지크리너 분해정비	100,000	87,615	100%	완료
	제1처리장 소화가스 저장탱크 정비공사	600,000	486,777	100%	완료
	1처리장 소화조 습식탈황설비 정비	100,000	77,722	100%	완료
	소화조 퇴적물 청소 용역	170,000	148,621	100%	완료
	제1처리장 분수조 보수공사	200,000	167,740	100%	완료
	제1처리장 송풍기A동 옥상방수공사	100,000	82,370	100%	완료
	노후직원사택 대수선공사	570,000	475,070	100%	완료
	센터 노후 경계휀스 교체공사	230,000	197,200	100%	완료

□ 공사진행중 : 73건

센터별	사 업 명	예 산 액	계 약 액	공 정 율	추진현황	비 고
중랑	#3처리장 초침슬러지수집기 부품교체	330,000	288,000	70%	추진중
	#3,4처리장 침사인양기 부품교체	300,000	262,900	60%	추진중
	#2처리장 계면측정기 설치	380,000	285,600	40%	추진중
	#3처리장 초침 오니수집기 감속기 커버 교체	85,000	43,535	80%	추진중
	#3,4처리장 조목스크린 교체	249,292	199,629	60%	추진중
	#2처리장 2차침전지 월류이끼류 방지	100,000	110,986	10%	추진중
	#2 1차침전지 지배수펌프 설치	100,000	86,212	10%	추진중
	#3,4처리장 현장 조작반 정비사업	100,000	107,989	35%	추진중
	#3,4처리장 종침 오니수집기 조작반 정비	92,000	135,831	10%	추진중
	2처리장 원심탈수기 이전 설치	650,000	530,000	30%	추진중
	3처리장 농축기 및 탈수기 유지보수	360,000	325,800	50%	추진중
	3처리장 소화가스 저장탱크개량	550,000	605,000	50%	추진중
	154KV 변압기 제작 구매 설치	1,500,000	1,166,000	5%	추진중
	슬러지 건조시설 배가스 처리시설 교체	150,000	135,960	10%	추진중
	분뇨처리장 악취방지시설 보완	700,000	497,000	90%	추진중
	건축물 유지관리	220,800	192,376	66%	추진중
	토목시설물 유지관리	200,000	176,913	50%	추진중
	차집관거준설 및 유지관리	1,800,000	1,492,792	25%	추진중
	소화조 및 저류조 퇴적물 제거	250,000	196,590	30%	추진중
	2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사	500,000	500,000	25%	추진중
난지	2처리장 반송슬러지펌프 교체	400,000	400,000	40%	추진중
	#2송풍기동 수배전반 교체	616,000	527,945	90%	추진중
	유입펌프장 모터펌프 교체	500,000	341,486	50%	추진중
	유입펌프장 침사인양기 교체	500,000	316,652	50%	추진중
	2처리장 고․저온수 탱크 및 펌프 제작구매 설치	900,000	886,000	70%	추진중
	열교환기 고저온수 탱크 교체	350,000	188,452	60%%	추진중
	1처리장 농축조 슬러지 수집기 제작구매 설치	400,000	297,814	30%	추진중
	종합협잡물 처리기 교체	380,000	316,000	60%	추진중
	난지수계 차집관거 준설 및 정비	1,800,000	1,560,458	50%	추진중
	센터내 시설물 보수	480,000	401,591	60%	추진중
	건축시설물 유지관리 보수	480,000	336,679	60%	추진중
	1처리장 최초침전지보수	800,000	681,356	45%	추진중
	관사리모델링 공사	800,000	차집관거 보수보강공사 등 집행		계획변경
	제1,2처리장 정밀안전진단용역	50,000	43,876	45%	추진중
	건설폐기물 처리용역	50,000	44,016	45%	추진중
	노후 상수도관 개선 용역	50,000	41,307	45%	추진중

센터별	사 업 명	예 산 액	계 약 액	공 정 율	추진현황	비 고
탄천	#1 슬러지수집기 부품제조구매설치	320,000	275,265	98%	추진중
	#1 싸이폰슬러지 수집기 정비	450,000	397,139	90%	추진중
	3차처리시설(MDF) 여과막 세정용역(단가계약)	200,000	145,905	60%	추진중
	발전기 분해정비(수리)	400,000	328,900	50%	추진중
	슬러지건조시설 정비	400,000	318,956	40%	추진중
	주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역의뢰	50,000	28,000	80%	추진중
	네트워크침입방지시스템 구매설치	250,000	203,799	10%	추진중
	건조시설 배출가스 TMS 구축	160,000	139,150	70%	추진중
	탈취설비 제조구매 설치	900,000	687,218	30%	추진중
	탈취배관설치공사	400,000	331,389	30%	추진중
	탄천수계차집관거준설공사(연간단가계약)	300,000	266,608	80%	추진중
	토목건축시설물보수 및 정비공사(연간단가)	900,000	1,373,855	70%	추진중	사업비추가
	차집관거보수 및 정비공사(연간단가)	400,000	347,324	60%	추진중
	센터내 녹지시설물 유지관리공사(연간단가)	200,000	170,716	50%	추진중
	건설폐기물처리용역(연간단가계약)	30,000	17,710	65%	추진중
	소화조 내외부 보수공사	800,000	673,909	75%	추진중
	성내천 횡단 본류역사이폰 보수 및 정비공사	600,000	490,098	15%	추진중
	초침 지하구조물 보수공사	1,400,000	1,208,102	45%	추진중
	저류조 등 밀폐시설 내부보수공사	240,000	206,249	45%	추진중
	처리장 수질자동측정기 위탁정비 용역	100,000	89,994	63%	추진중
서남	1처리장 최초침전지 슬러지수집기 부품 교체	650,000	564,338	95%	추진중
	서남물재생센터 소화가스 전용 발전기 예방정비	400,000	350,000	60%	추진중
	서남물재생센터내 정량펌프 부품 구매(단가계약)	220,000	187,687	60%	추진중
	1처리장 농축기동 원심농축기 분해정비	342,000	288,359	60%	추진중
	1처리장 탈수기동 원심탈수기 분해정비	120,000	92,109	30%	추진중
	1처리장 소화조 온수배관 교체공사	250,000	210,498	90%	추진중
	수질계측기 유지관리 용역	204,000	139,987	55%	추진중
	2처리장 침전지 악취방지용 덮개 제조구매 설치	400,000	123,175	5%	추진중
	감시제어설비 교체 및 정비	215,000	192,665	70%	추진중
	1처리장 가스전처리 실록산제거용 활성탄 교체	120,000	33,250	70%	추진중
	믈재생센터관리시스템 재구축(기능고도화)	215,000	192,500	30%	추진중
	제1처리장 정밀안전점검 용역	50,000	43,740	60%	추진중
	2015 서남수계 하수차집관거 준설공사(연간단가)	400,000	345,627	60%	추진중
	서남수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)	800,000	690,223	80%	추진중
	2015 센터내 시설물 정비공사(연간단가)	800,000	683,122	65%	추진중
	제1처리장 최초침전지 보수공사	600,000	505,833	40%	추진중
	2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)	30,000	24,686	70%	추진중

□ 추가사업 공사진행중 : 2건

센터별	사 업 명	예 산 액	계 약 액	공 정 율	추진현황	비고
탄천	정문 절개지 사면 정비공사	600,000	토목․건축시설물 보수 공사에 포함집행		추진중	추가사업
	보안 CCTV 모니터시스템 구매 설치	160,000	127,000	5%	추진중	〃

□ 발주(설계)중 : 15건(추가사업 8건 포함)

센터별	사 업 명	예 산 액	계 약 액	공 정 율	추진현황	비고
중랑	#3처리장 초침 생오니 전동밸브 교체	280,000			공고중
	#3,4처리장 침사지 초침 유입수문 수리	210,000			설계중
	#3처리장 슬러지수집기 진공관 개량	132,000			공고중
	#2생물반응조 계측기 설치	66,000			설계중
	3처리장 슬러지 호퍼실 고속자동문 설치	100,000			공고중
	슬러지 전처리시설 제작 구매 설치	900,000	농축기 구매방침 완료		설계중	계획변경
	소화조 유지관리	900,000			공고중
탄천	제2처리장 MDF 수문설치공사	300,000			심사중	추가사업
	점검업무용 CCTV 구매설치	450,000			심사중	〃
	터보송풍기 제조구매설치	800,000			설계중	〃
서남	악취모니터링 시스템 구매설치	300,000			심사중	〃
	#2 분배조 보수공사	500,000			공고중	〃
	하수슬러지 임시야적장 설치공사	100,000			공고중	〃
	#1 소화조 염화제이철 투입설비 설치	100,000			공고중	〃
	터보송풍기 제조구매설치	800,000			설계중	〃