도로부속시설물 일상유지관리

특별시도상 도로부속물을 최적의 상태로 유지 관리하여 차량통행의 안전성을 확보하고 시민통행의 불편 해소

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,915,167	2,000,000	1,760,000	감)240,000	감)12%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
미끄럼방지포장 보수실적(㎡)			3,500	7,470	9,900	6개 도로사업소 보수면적 합산	보수면적
충격흡수시설 보수 개소수(개소)			30	60	50	6개 도로사업소 보수면적 합산	보수(개량)개소
도로부속물 세척실적(㎡)			40,000	75,530	94,000	6개 도로사업소 보수면적 합산	세척면적

사 업 설 명

□  사업목적

○  특별시도상 부속시설물을 최적의 상태로 유지 관리하여 차량통행의 안전성 확보 및 시민불편 해소

□  사업근거

○  법령상 근거

- 국토교통부 『도로안전시설 설치 및 유지관리 지침』,『시설물의 안전에 관한 특별법 시행령』

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-  도로부속물 일제조사 및 정비계획(도시교통본부장 방침, 도로관리담당관-15354(2008. 9.3)

□  사업내용

○  대    상 : 특별시도상 도로부속시설물

○  규    모 : 미끄럼방지포장 9,900㎡, 충격흡수시설보수 50개소, 방호울타리(중)파손보수  1,110m, 도로부속물세척 94,000㎡, 단면복구 및 표면처리 380㎡, 옹벽연석정비(con'c)  100m, 옹벽균열(시공이음)보수 700m, 과속방지턱보수 180m, 돌포장 파손보수 450㎡ 등

○  사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12

○  사업내용 : 시도상 도로부속물의 파손, 균열, 노후  등 수시 보수(정비)

○  ’15년도 소요예산(안) : 1,760,000천원

- 도로부속시설물 현황

구 분	도로옹벽 (km)	과속방지턱 (개)	충격흡수 시설(개)	미끄럼방지 시설 (㎡)	방호울타리 (km)	비고
수 량	7.936 (45)	367	890	307,722 (548)	420,213 (770)	( )개소

□  추진경위

○  ‘14. 7 : ’15년도 예산편성(안) 자료 조사(자치구, 도로사업소) 및 검토

□  2015년도 예산(안)                                        (단위 : 천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		1,915,167	2,000,000	1,760,000	감)240
	시책추진업무추진비	9,346	10,000	10,000	-
	시 설 비	1,905,821	1,990,000	1,750,000	감)240

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 시책추진업무추진비    : 10,000천원

￭ 시설비  : 1,750,000천원

‧ 미끄럼방지포장        :  9,900㎡ x    40,000원 = 396,000,000원

‧ 충격흡수시설보수      :   50개소 x 4,000,000원 = 200,000,000원

‧ 방호울타리(중)파손보수 :  1,110m x   250,000원 = 277,500,000원

‧ 도로부속물세척        : 94,000㎡ x     6,000원 = 564,000,000원

‧ 단면복구 및 표면처리  :  100㎡   x   150,000원 =  15,000,000원

‧ 옹벽연석정비(con'c)   :   100m  x  230,000원 =  23,000,000원

‧ 옹벽균열(시공이음)보수 :   700m  x    40,000원  =  28,000,000원

‧ 과속방지턱보수        :   180m  x  360,000원  =  64,800,000원

‧ 돌포장파손보수        :   450㎡  x  325,000원  = 146,250,000원

‧ 기타 부대공            : 1식  x 35,450,000원  =    35,450,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 도로부속시설물 유지관리계획 수립 → 예산배정 → 공사 계약 및 착수 → 공사시행 → 사업완료

○  계약체결

- (일반)경쟁입찰

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 옹벽보수 420㎡, 과속방지턱 도색 2,845㎡, 미끄럼방지포장 14,400㎡, 중앙분리대 보수 500m, 방호울타리 보수 3,900m 등
2013년도	‧ 미끄럼방지시설 9,600㎡, 방호울타리 보수 2,310m, 충격흡수시설보수 76개소, 옹벽벽체보수 2,750㎡, 옹벽 균열보수 400m 등
2014년도	‧ 미끄럼방지포장 9,900㎡, 충격흡수시설보수 96개소, 방호울타리(중)파손보수 1,110m, 도로부속물세척 94,000㎡, 과속방지턱보수 180m, 돌포장파손보수 450㎡ 등

○  향후 기대효과

- 차량통행의 안전성 확보 및 시민의 생명과 재산 보호

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 도로부속물 상시 유지관리 체계 구축으로 시민불편 해소

- 도로부속시설물 최적의 기능유지로 차량통행의 안전성 확보

○  추진일정                                                           (단위 : 천원)

사 업 추 진 절 차	추 진 기 간	예산집행계획	추 진 세 부 내 용
계		1,760,000
도로부속시설물 유지관리 계획 수립	‘15. 1. 1 ~ 1.31	-	정비계획 및 부서별 소요예산 산정
실시설계용역 및 준공	‘15. 2. 1 ~ 3.31	30,000	실시설계 완료
공사발주 및 계약	‘15. 4. 1 ~ 4.30	-	공사발주, 입찰공고, 개찰, 계약 시행
공사착공 및 시행	‘15. 5. 1 ~ 11.30	870,000	연간단가 공사로 차수별 준공에 따른 기성금 지급(연4~5회)
공사완료	‘15.12.1 ~ 12.31	860,000	15년 사업완료

참 고 자 료

□ 위 치 도

□ 현황 사진

사 진 설 명	충격흡수시설 파손

□ 현황 사진

사 진 설 명	차량방호울타리 파손
사 진 설 명	중앙분리대 보수