□ 양식 제7호 서식 - (세출·기금·중기 공통) 사업설명서 □ - 워드작성

면목천복개구조물 보수·보강공사

최근 지속적인 강우와 국지성 호우 등이 발생되어 도로 노면의 열화부에 포트홀이 반복적으로 발생되어 시민의 불편을 초래하고 있으며, 방수층의 손상으로 복개구조물 내부 구조물의 손상을 가중시키고 있어 2015년 예산을 반영 복개구조물의 안전성 확보 및 도로 평탄성 유지로 쾌적한 도로교통 소통에 기여하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
	-	1,025,000	1,025,000	-

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  본 복개구조물은 1992년 준공된 구조물로 공용기간이 약 22년 경과됨에 따라 도로 포장면 및 방수층의 손상으로 복개구조물 내의 오랜 공용에 따른 열화 등이 발생됨에 따라 구조물의 사용성 및 내구성 확보를 위해 보수․보강공사를 실시하는데 그 목적이 있음

○  본 복개구조물은 2013년 12월까지 실시한 정밀안전진단 결과 기능발휘에는 지장이 없으며 사용성 및 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 B등급(양호)으로 지정

□  사업근거

○  법령상 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 2013년 정밀안전진단 지적사항 보수·보강

- 2014년 정기점검 및 민원에 의한 도로부 재포장 필요

□  사업내용

○  지원대상 :  면목천 복개구조물

○  규    모 :  B = 15.5∼25.0m(3∼6련), L = 1,900m

○  사업기간 :  2015, 03 ~ 07

○  사업내용 : 도로 포장면 및 방수층의 손상 발생과 복개구조물 내의 오랜 공용에 따른 열화 등이 발생됨에 따라 구조물의 사용성 및 내구성 확보를 위한 보수․보강공사

○  ’15년도 소요예산(안) : 1,025,000천원

□  추진경위

○  최근 지속적인 강우로 인한 도로면 및 방수층 손상으로 아스팔트 부분 재포장

○ 복개 구조물의 콘크리트에 발생된 손상의 2차 손상 발생방지 및 내구성 및 사용성 확보를 위한 보수

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					1,025,000	1,025,000
		터널 및 복개 시설물 관리			1,025,000	1,025,000
		감리비
	시설비
		면목천복개구조물 보수.보강공사			1,025,000	1,025,000
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 도로 포장면 보수공사

‧ 아스콘 포장 : 16,020㎡ × 1㎡당 22,500원 = 360,450천원

‧ 교면방수 :  : 16,020㎡ × 1㎡당 36,000원 = 576,720천원

￭ 복개구조물 보수공사

‧ 주입보수(0.3mm이상) : 121.1m × 1m당 190,000원 = 23,009천원

‧ 단면보수(철근방청)    :  96.58㎡ × 1㎡ 당 360,000원 = 34,769천원

￭ 기타경비

- 비계 등 설치 : 1식 = 30,052천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산확보 및 설계 후 예산배정에 따라 공사발주

○  계약체결

- 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거 계약체결

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ 정밀안전진단용역 시행 ‧
2014년도	‧ 정기점검 시행 ‧

○  향후 기대효과

- 시설물의 안전성 및 내구성 증진

- 시설물 이용 시민의 안전 확보 및 도로교통 소통에 기여

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가 : 해당 없음

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧

-

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015. 3 : 공사 발주

- 2015. 4 : 보수.보강공사 착공

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		1,025,000
계약심사이행 및 발주	2015. 3	-
공사 착공	2015. 4	-	보수공사 시행
공사 준공	2015. 7	1,025,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적 : 해당 없음

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  보수.보강공사 시행으로 시설물 안전성 및 교통소통 원활

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	1,025,000	‣ 2015년도 예산(안) 산출 근거 참고
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
성동도로사업소	시설보수과	과장	박 춘 배 (02-2210-1560)	주무관	최 태 석 (02-2210-1551)

참 고 자 료

□  위치도 및 현황사진

TYPE - 1 TYPE - 2 TYPE - 3 TYPE - 4 TYPE - 5 TYPE - 7 TYPE - 6		TYPE-1 (Sta. -0k 121∼0k 000, L=112m)
		TYPE-2 (Sta. 0k 000 ∼ 0k 510, L=510m)
		TYPE-3 (Sta. 0k 510 ∼ 0k 540, L=30m)
		TYPE-4 (Sta. 0k 540 ∼ 1k 094, L=554m))
		TYPE-5 (Sta. 1k 094 ∼ 1k 260, L=166m)
		TYPE-6 (Sta. 1k 260 ∼ 1k 722, L= 462m)
		TYPE-7 (Sta. 1k 722 ∼ 1k 788, L= 66m)

포장면 균열	포장면 마모 및 망상균열
신축이음 상부 포트홀	포장면 포트홀
포장면 포트홀 및 소성변형	덧씌우기에 따른 포장면 불량과 소성변형

슬래브 하면 균열부 백태	슬래브 하면 종방향 균열
신축이음부 누수	시공이음부 시공불량에 따른 누수
시공시 다짐불량에 따른 재료분리	피복두께 부족에 따른 철근노출