방음시설 설치 및 보수·보강

특별시도변에 정온한 환경을 요하는 학교, 주거 밀집지역 등의 방음벽을 효과적으로 설치·관리하여 쾌적한 생활환경 조성

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
2,446,727	2,000,000	2,874,000	874,000	0.437%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
방음벽 개량 개소수(개소)	6	4	2	6	10	개량7 교체2 신설1

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  특별시도 주변 교통소음 저감으로 정온한 면학분위기 및 쾌적한 주거환경을 조성

○  노후 및 파손으로 도시환경을 저해하는 방음벽 개량으로 시민불편 해소.

□  사업근거

○  법령상 근거

- 『서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례』 제47조(비용의 지원)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 도로변 방음벽 효율적인 관리대책('07.12.17. 행정2부시장 방침 제470호)

□  사업내용

○ 대    상 : 특별시도 상 학교, 주거밀집지역 등

○  규    모 : 노후 방음시설 개량 7개소, 투명형 방음판 교체 2개소, 신설1개소

- 중구 예장동 산3-20(남산1호터널변), 성북구 한천로 95길 28(남대문중교)

- 영등포구 국제금융로 7길 46(여의도중교), 노원구 노원로 586(노원고교),

- 송파구 문정로 5길 20(문정초교), 용산구 반포로 용암한신아파트

- 강남구 압구정로 225(압구정중고교), 강동구 고덕로 27길 12(강일중교)

- 서초구 반포동 753(세화고교), 송파구 강동대로 62 올림픽대교남단(잠실세무서)

○  사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12

○  사업내용 : 노후 및 파손으로 도시환경을 저해하는 방음벽 개량

○  ’15년도 소요예산(안) : 2,874,000천원

□  추진경위

○  ‘14. 7 : ’15년도 예산편성(안) 자료 조사 (자치구, 도로사업소) 및 검토

□  2015년도 예산(안)                                        (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			2,446,727	2,000,000	2,874,000	874,000
		시설비	2,446,727	2,000,000	2,874,000	874,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 노후 방음시설 개량 : 2,659,180천원

‧ 중구 예장동 산3-20(남산1호터널변) : H=4.0m, L=44m, 176㎡ x 710,000원  = 124,960,000원

‧ 성북구 한천로 95길 28(남대문중교) :  H=6.0m, L=88m, 528㎡ x 460,000원  = 242,880,000원

소음감쇠기 310,000 x 88m = 27,280,000원

‧ 영등포구 국제금융로 7길 46(여의도중교) : H=4.0m, L=260m, 1,040㎡ x460,000원  = 478,400,000원

‧ 노원구 노원로 586(노원고교)      : H=3.5m, L=106m, 371㎡ x 460,000원  = 170.660,000원

‧ 송파구 문정로 5길 20(문정초교) :  H=5.5m, L=151m, 830㎡ x 460,000원  = 381,800,000원

‧ 용산구 반포로 용암한신아파트 : H=3.0m, L=340m, 1,020㎡ x 460,000원  = 469,200,000원                                                        실시설계용역비 1식 : 30,000,000원

‧ 서초구 반포동 753(세화고교)  :  H=6.0m, L=306m, 1,836㎡ x 400,000원  = 734,000,000원

￭ 반사형 방음판 교체 : 29,600천원

‧ 강남구 압구정로 225(압구정중고교) : B=0.15~1.5m, N=52개, 72㎡ x 200,000원  = 14,400,000원

‧ 강동구 고덕로 27길 12(강일중교)  :    B=2.0m, N=19개, 76㎡ x 200,000원  = 15,200,000원

￭ 방음시설 설치 : 140,000천원

‧ 송파구 강동대로 62 올림픽대교 남단(잠실세무서) : B=6.0m, L=30m, 180㎡ x 777,000원 = 140,000,000원

￭ 도로관리과 : 45,220천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방음시설 정비계획 수립 → 예산재배정 → 공사계약 및 착수 → 공사시행 → 사업완료

○  계약체결

- 제한(일반)경쟁입찰

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 방음시설 신설 및 정비(신설 3개소, 정비 3개소, 저소음포장 24a)로 정온하고 쾌적한 도시환경 조성
2013년도	‧ 방음시설 신설 및 정비(신설 2개소, 정비 2개소)로 정온하고 쾌적한 도시환경 조성
2014년도	‧ 방음시설 신설 및 정비(개량 5개소, 정비 3개소)로 정온하고 쾌적한 도시환경 조성

○  향후 기대효과

- 교통소음 저감으로 시민불편 해소 및 쾌적한 도시환경 조성

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후 방음시설 정비로 방음시설을 효과의 기능을 유지하여 정온하고 쾌적한 도시환경 조성

○  추진일정                                                          (단위 : 천원)

사 업 추 진 절 차	추진기간	예산집행계획	추 진 세 부 내 용
계		2,874,000
방음시설 정비계획 수립	‘15. 1. 1 ~ 1.31	-	정비계획 및 소요예산 산정
실시설계용역 및 준공	‘15. 2. 1 ~ 3.31	30,000	실시설계 완료
공사발주 및 입찰	‘15. 4. 1 ~ 4.30	-	공사발주, 입찰공고, 개찰, 계약 시행
공사착공 및 시행	‘15. 5. 1 ~ 11.30	1,844,000	방음벽 설치 및 정비공사 시행 선급금 및 기성금 지급
공사완료	‘15.12.1 ~ 12.31	1,000,000	15년 사업완료

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	4,548,000	599,708		5,147,708	4,758,331	296,798	92,579
2012	2,100,000	296,798		2,396,798	1,728,443	500,610	167,745
2013	3,787,000	258,312		4,045,312	2,217,101		1,828,211

실·본부·국	부서명	담당자
도시안전실	도로관리과	도로안전시설팀장	김순수 (2133-8175)	주무관	박성록 (2133-8177)

참 고 자 료

□  위 치 도

위 치	용산구 용산2가동 47-5 용암한신아파트 앞(녹사평대로)
용산구 용산2가동47-5(용암한신앞파트):반포로 h=3.0m, L=340m

□ 현 황 사 진

사 진 설 명	노후된 방음벽 개량(높이 2m→3m 조정)

참 고 자 료

□  위 치 도

위 치	압구정동 471 압구정고등학교(압구정로, 언주로)

□ 현 황 사 진

사 진 설 명	노후된 방음벽 개량