중랑교 보수□보강공사

정밀안전진단용역(‘11.6~’12.2)에서 교면포장 열화와 교량받침 노후로 구조물 내구성이 저하상태인 C등급으로 판정되어 성능향상을 위해 2013년 5월부터 계속공사로 시행되고 있는 바, 교량 내구성 및 안전성을 확보하기 위해서는 계속적인 보수 ․ 보강공사가 필요함.

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,040	1,900	500	1,400	26.32

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  정밀안전진단용역에서 C등급으로 판정된 중랑교에 대하여 보수 ․ 보강을 통한 등급 상향

(C등급 → B등급)

○  시설물의 안전성과 내구성 증진으로 시설물의 안전성 확보 및 쾌적한 도로환경 개선

□  사업근거

○  법령상 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의한 정밀안전진단

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 정밀안전진단 결과 (2011.6.22~2012.2.3)

□  사업내용(전체)

○  위    치 : 동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474

○  규    모 : B=25.0m, L=154m, PSC빔교,  1971년 준공

○  사업기간 : 2013. 5. 2 ~ 2015. 5. 30 (계속공사)

○  사업내용 : 교면포장 2,982㎡, 신축이음 200m, 신구교강결 154m, 교량받침교체 168개소,

슬래브성능개선(단면증설) 2,184㎡, 연결통로설치  등

○  총사업비 : 3,440백만원(2013년 1,040백만원, 2,014년 2,400백만원)

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474

○  사업규모 : B=25.0m, L=154m, PSC빔교,  1971년 준공

○  사업내용 : 탄소리바 설치 1,553m, 단면증대 756㎡, 연결통로 설치 188m,

조류방지망 설치 281㎡, 부대공 1식 등

○  소요예산(안) : 500백만원

□  추진경위

○  2010. 03. 31 : 노후 도로구조물 안전관리 방안(행정제2부시장 방침 제133호)

○  2012. 02. 03 : 중랑교 정밀안전진단용역 완료(동우기술단)

○  2012. 12. 24 : 중랑교 보수보강공사 실시설계(제일엔지니어링)

○  2013. 05. 02 : 중랑교 보수 ․ 보강공사 착공(계속공사)

○  2014. 02. 19 : 중랑교 보수 ․ 보강공사 1차 준공

○  2015. 03. 05 : 중랑교 보수 ․ 보강공사 2차 착공

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,040	1,900	500	△1,360
		시설비	1,040	1,900	500	△1,360
	세부사업명
		중랑교보수 ․ 보강	1,040	1,900	500	△1,360

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

※ 사업비 : 500,000천원

￭ 시설비

- 성능개선(탄소리바 설치) : 1,553m × 120천원  = 186,360천원

- 단면증대 : 756㎡ × 280천원                     = 211,680천원

- 연결통로 설치 : 188m × 256천원                =  48,128천원

- 조류방지망 설치 : 281㎡ × 70천원               =  19,670천원

- 부대공 1식                                      =  34,162천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 → 공사계약 → 공사시행 → 사업완료

○  계약체결

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거 계약 체결

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 정밀안전진단 시행 ‧ 실시설계용역 시행
2013년도	‧ 공사 시행 ‧ 교량받침교체 168개소, 내진보강 교각 6개 166㎡
2014년도	‧ 공사 시행중 ‧ 교면포장 30a, 보도정비 7.5a, 슬래브강결 154m, 신축이음교체 200m 등

○  향후 기대효과

-  노후 시설물의 안전성 및 내구성 증진으로 등급 상향(C등급 → B등급)

- 이용 시민 안전확보 및 쾌적한 도로환경 개선

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015. 1 : 3차 공사 계약(장기계속 사업)

- 2015. 5 : 공사 준공

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		500
공사시행(3차)	2015. 01. ~ 05.	500	교량성능개선 및 부대공 등
공사준공	2015. 05	500	준공

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		3,440	1,040	1,900	500
시설비		3,440	1,040	1,900	500
	기본조사설계비	-
	실시설계비	-
	보상비	-
	공사비	3,440	1,040	1,900	500
(예산과목)		도시안전실 도로시설과	일반교량관리	중랑교보수 보강공사	시설비

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2013	3,440	-	2013	2014	확정
( )차 변경	-
( )차 변경	-
2015년도 요구	2013	3,440	-	2013	2015	3차분 공사비

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2010	-
2011	-
2012	-

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○  중랑교 보수,보강공사 시행으로 시설물의 내구성 및 안전성 확보

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	500	‣ 정밀안전진단 결과에 의한 보수물량
2016	-	‣
2017	-	‣
2018	-	‣
2019	-	‣

실․국	부서명	담당자
성동도로사업소	시설보수과	시설보수과장	박 춘 배 (02-2210-1560)	주무관	임 승 민 (02-2210-1558)

참 고 자 료

□  위치도

중랑교

(L=154.0m, B=25.0m)

중랑천

중랑교

중랑역

망우로

(청량리방향)

망우로

(구리방향)

중랑구

동대문구

□  위 치 도

교면포장 소성 및 열화 파손	신축이음장치 파손