차량방호울타리 및 중앙분리대 정비사업

안전성(등급미달 등) 및 시인성이 부족하고, 노후로 정비를 요구되는 차량방호울타리(중앙분리대)를 개선하여 차량통행의 안전성 확보

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,735,674	1,000,000	500,000	-500,000	-50%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
차량방호울타리 보수(km)			1.6	1.9	2.0	보수연장 합산	보수 연장

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  안전성(등급미달 등) 및 시인성이 부족하고, 노후된 차량방호울타리(중앙분리대)를 개선하여 차량통행의 안전성 확보

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-  국토교통부 『도로안전시설 설치 및 유지관리 지침』

-  도로 방호울타리 보강계획 수립('10.8.10. 시장방침 제296호)

□  사업내용

○  대    상 : 특별시도상 차량방호울타리 및 중앙분리대

○  사업기간 : ‘15. 1 ~ 12

○ 규 모 : 차량방호울타리 2,000m 정비

○  ’15년 소요예산(안) : 500,000천원

○  사업내용

- 안전성 및 시인성이 부족한 시설물을 규정 등급(SB 4등급 이상)이상으로 개선

- 노후로 안전성이 떨어지는 시설물 정비

□  추진경위

○  ‘14. 7 : ’15년도 예산편성(안) 자료 조사(자치구, 도로사업소) 및 검토

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계		1,735,674	1,000,000	500,000	-500,000
	시설비	1,735,674	1,000,000	500,000	-500,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 방호울타리 정비 : 290,000천원

- 양화로 양화대교 북단      : 360m x 250,000원 =  90,000,000원

- 가리봉철도고가 접속부 옹벽 : 800m x 250,000원 =  200,000,000원

￭ 도로관리과 : 210,000천원

- 기타 1식 : 840m x 250,000원 =  210,000,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

-시설물 개선계획 수립 →  공사 계약 및 착공(사업소) → 공사시행 → 사업완료

○  계약체결

- 제한(일반)경쟁입찰

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 중앙분리대 560m, 방호울타리 9,453m 정비로 차량통행의 안전성 확보
2013년도	‧ 중앙분리대 3,300m, 방호울타리 4,200m 정비로 차량통행의 안전성 확보
2014년도	‧ 중앙분리대 2,422m, 방호울타리 1,178m 정비로 차량통행의 안전성 확보

○  향후 기대효과

- 차량방호울타리, 중앙분리대 안전성 및 시인성 확보로 안전하고 쾌적한 도로환경조성

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 안전성 및 시인성이 부족한 시설물을 규정 등급(SB 4등급 이상)이상으로 개선

- 노후로 안전성이 떨어지는 시설물 정비

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		500,000
정비계획 수립	‘15. 1. 1 ~ 1.31	-	차량방호울타리, 중앙분리대 정비계획 수립
공사계약 및 착공	‘15. 3. 1 ~ 3.30	-	공사발주, 입찰공고, 개찰, 계약 시행
공사시행	‘15. 4. 1 ~ 11.30	290,000	차량방호울타리, 중앙분리대 정비 선급금 및 기성금 지급
공사완료	‘15.12.20	210,000	15년 사업완료

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	4,880,000			4,880,000	4,790,243		89,757
2012	2,400,000			2,400,000	2,329,296		70,704
2013	1,800,000			1,800,000	1,735,674		64,325

참 고 자 료

□ 위 치 도

위 치	양화로 양화대교 북단
양화대교북단 비규격 → 규격교체 연장 360m

□ 현황 사진

사 진 설 명	노후 및 비규격 중앙분리대를 규격제품(SB4등급이상)으로 교체

참 고 자 료

□ 위 치 도

위 치	남부순환로 가리봉철도고가 접속부

□ 현황 사진

사 진 설 명	차량방호울타리 정비