□ 양식 제7호 서식 - (세출·기금·중기 공통) 사업설명서 □ - 워드작성

청량제1고가 성능개선공사

본 고가는 중랑구와 동대문구를 연결하는 주요노선(망우로)중 하나인 시설물로서, 설계하중이 DB-18이고, 공용년수가 45년 이상 경과한 상태로 2014년 실시설계용역 중으로 조속히 성능을 개선하여 시설물의 안정성 확보 및 교통소통에 기여하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
	100,000	2,980,200	2,880,200	2,880

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  본 고가는 작업공간 협소로 인해 보수·보강공사가 원활하게 시행되지 못하고, 성능은 향상 될 수 없으므로(DB-18로 유지됨), 진행 중인 실시설계용역의 실시설계를 통한 성능개선을 조속히 시행하여 시설물의 효용을 증진시키고 공공의 안전을 확보 하는데 그 목적이 있다.

□  사업근거

○  법령상 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

○  기타 근거

- 시조사삼거리 교차로구간 개선공사(도로계획과 2014년 예산 1,887,000천원)

- 청량제1고가 성능개선공사 실시설계용역 시행(용역기간 : 2014.04.03.~2014.09.29.)

□  사업내용

○  지원대상 : 청량제1고가

○  규    모 : L=28.0m B=30.0m

○  사업기간 : 2014.3 ~ 2015.12

○  사업내용 : 성능개선 실시설계 및 공사

○  ’15년도 소요예산(안) : 2,980,200천원

□  추진경위

○  DB-18인 교량으로 정밀점검결과 C등급으로 평가되어, 성능개선 필요

○ 실시설계용역 시행중 : 2014.04.03.~2014.09.29.

- 시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계에 포함 시행

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계				100,000	2,980,200	2,880,200
		고가차도 및 입체교차로 관리		100,000	2,980,200	2,880,200
		시설비
	(예산과목)
		청량제1고가 성능개선공사		100,000	2,980,200	2,880,200
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 청량제1고가 성능개선 개략공사비 : 2,980,200천원

‧ 바닥판+PSC Beam 설치 : 840㎡ × 2,000,000원 = 1,680,000천원

‧ 교면포장 + 교면방수 : 840㎡ × 80,000원 = 67,200천원

‧ 신축이음장치 설치 : 70m × 1,200,000원 = 84,000천원

‧ 받침장치 설치 : 40개소 × 7,000,000원 = 280,000천원

‧ 방호울타리 설치 : 112m × 858,000원 = 96,000천원

‧ 복공판 및 가시설물 설치 : 1300㎡ × 150,000원 = 195,000천원

‧ 보도신설 : 280㎡ × 300,000원 = 84,000천원

‧ 기타부대공 : 교통시설비+폐기물처리비+가건물사용+점검시설물설치비 = 165,000천원

- 교통시설비(50,000천원), 폐기물처리비(16,000천원), 점검시설물설치비(35,000천원)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산확보 및 실시설계용역 결과에 의거 발주

○  계약체결

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 곤한 법률에 의거 계약체결

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ 실시설계용역 시행 ‧

○  향후 기대효과

- 시설물 성능개선으로 안정성 및 교통소통 원활

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가 : 해당 없음

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧

-

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015. 2 : 공사 발주

- 2015. 3 : 성능개선공사 착공

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		2,980,200
계약심사이행 및 발주	2015. 3	-
공사 착공	2015. 4	-	보수공사 시행
공사 준공	2015.12	2,980,200

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적 : 해당 없음

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  성능개선공사 시행으로 시설물 안전성 및 교통소통 원활

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	2,980,200	‣ 2015년도 예산(안) 산출 근거 참고
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
성동도로사업소	시설보수과	과장	박 춘 배 (02-2210-1560)	주무관	최 태 석 (02-2210-1551)

참 고 자 료

□  위치도 및 현황사진

	청량 제1고가차도

전   경   사   진

청량제1고가차도 상부 전경

청량제1고가차도 측면 전경