2-1. 하남선(5호선연장) 광역철도 건설

<교통개선분담금>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

▷ 하남선(5호선연장) 광역교통시행계획 고시(국토부)('11.12.30)

- 하남선(5호선 연장) 광역철도 지정, 총연장 8.0㎞(강일역~검단산역)

▷ 하남선 복선전철 기본계획 고시(국토부)(’13.11.20)

- 총연장 7.725km(상일동 ~ 하남시 창우동)

- 사업기간 : 2011년～2020년 (1단계 2011년～2018년, 2단계 2011년～2020년)

▷ 하남선 사업추진 기본방침 수립(도시교통본부)(’14.02.07)

▷ 하남선건설공사 추진계획 방침(도기본)(’14.02.10)

▷ 하남선 건설사업 협약체결(서울시,경기도,하남시,LH,서울시도시철도공사)(’14.03.18)

○  위    치 : 상일동 ~ 서울시계

○  규    모 : 정거장 1개소(168m), 본선 4.099㎞,  차량기지 입출고선 1.365㎞

○  사업기간 : 2011년 ～ 2019년

○  총사업비 : 357,530백만원('15년 : 6,147백만원)

○  추진방식 : 재배정(도시기반시설본부 도시철도국)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,565백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	6,147	0	5	890	890	890	890	429	429	429	429	429	437
	(58%)	0.00	0.14	24.96	24.96	24.96	24.96
시설비	4,559	0	0	661	661	661	661	319	319	319	319	319	320
감리비	1,580	0	0	229	229	229	229	110	110	110	110	110	114
시설부대비	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015. 3.~12. :  선금 및 기성금 지급

▷ 인허가, 현장사무실 및 환경시설물 설치

▷ 본선 구간 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

▷ H1정거장 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

▷ 본선환기구 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 7.2%)

○  '15.03.        : 공사계약

○  '15.04.        : 공사착공

○  '15.04. ~12. : 사업착공 및 공사시행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  동광교회(종교시설과의 이격거리가 2m), 고덕주공3단지 상가 등 노후건물지역, 대한연세요양원, 강일리버파크 9,10단지아파트 등 인접하여 가시설 설치를 위한 파일 설치 및 굴착작업 등에 따른 소음·진동·분진 및 통행불편, 근접 건물 변위 발생 등으로 민원이 예상됨.

○  민원관리대책

· 공사 전 주민설명회 개최, 현장견학 등 대민 소통강화 실시

· 동광교회 관계자 등을 수시로 방문하여 적극적으로 민원 해결 실시

· 주거지 인접구간 미진동 발파 및 소규모 분할 발파

· 건물기초지반 그라우팅 보강 및 건물 내 계측기 설치 정밀분석

· 소음·진동·분진 등 저감대책 수립

· 이동식 방음벽 및 소음기 설치로 민원예방

· 정온시설 사전협의를 통한 발파 작업시간대 조정

· 단계별 교통처리계획으로 민원해소 등

작성자	도시철도계획부장 : 박상돈 ☎772-7020 계획과장 : 김진팔 ☎7021 담당 : 신상형 ☎7130

2-2. 하남선(5호선연장) 광역철도 건설

<광역교통시설특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 :

▷ 하남선(5호선연장) 광역교통시행계획 고시(국토부)('11.12.30)

- 하남선(5호선 연장) 광역철도 지정, 총연장 8.0㎞(강일역~검단산역)

▷ 하남선 복선전철 기본계획 고시(국토부)(’13.11.20)

- 총연장 7.725km(상일동 ~ 하남시 창우동)

- 사업기간 : 2011년～2020년 (1단계 2011년～2018년, 2단계 2011년～2020년)

▷ 하남선 사업추진 기본방침 수립(도시교통본부)(’14.02.07)

▷ 하남선건설공사 추진계획 방침(도기본)(’14.02.10)

▷ 하남선 건설사업 협약체결(서울시,경기도,하남시,LH,서울시도시철도공사)(’14.03.18)

○  위    치 : 상일동 ~ 서울시계

○  규    모 : 정거장 1개소(168m), 본선 4.099㎞,  차량기지 입출고선 1.365㎞

○  사업기간 : 2011년 ～ 2019년

○  총사업비 : 357,530백만원('15년 : 5,994백만원)

○  추진방식 : 재배정(도시기반시설본부 도시철도국)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 3,476백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	5,994	0	0	866	866	866	878	417	417	417	417	417	432
	(58%)	0.00	0.00	24.91	24.91	24.91	25.26
시설비	5,680	0	0	823	823	824	824	397	397	397	397	397	401
감리비	296	0	0	43	43	43	43	20	20	20	20	20	24
시설부대비	18	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	7

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 2015. 3.~12. :  선금 및 기성금 지급

▷ 인허가, 현장사무실 및 환경시설물 설치

▷ 본선 구간 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

▷ H1정거장 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

▷ 본선환기구 : 줄파기 및 가시설 작업(H-pile+토류벽, 주형보, 차수그라우팅)

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 7.2%)

○  '15.03.        : 공사계약

○  '15.04.        : 공사착공

○  '15.04. ~12. : 사업착공 및 공사시행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  동광교회(종교시설과의 이격거리가 2m), 고덕주공3단지 상가 등 노후건물지역, 대한연세요양원, 강일리버파크 9,10단지아파트 등 인접하여 가시설 설치를 위한 파일 설치 및 굴착작업 등에 따른 소음·진동·분진 및 통행불편, 근접 건물 변위 발생 등으로 민원이 예상됨.

○  민원관리대책

· 공사 전 주민설명회 개최, 현장견학 등 대민 소통강화 실시

· 동광교회 관계자 등을 수시로 방문하여 적극적으로 민원 해결 실시

· 주거지 인접구간 미진동 발파 및 소규모 분할 발파

· 건물기초지반 그라우팅 보강 및 건물 내 계측기 설치 정밀분석

· 소음·진동·분진 등 저감대책 수립

· 이동식 방음벽 및 소음기 설치로 민원예방

· 정온시설 사전협의를 통한 발파 작업시간대 조정

· 단계별 교통처리계획으로 민원해소 등

작성자	도시철도계획부장 : 박상돈 ☎772-7020 계획과장 : 김진팔 ☎7021 담당 : 신상형 ☎7130