【 서식 #2 】

(2/4) 분기 실적 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 사 업 명 : 독서근린공원 지하주차장 건설

2. 위    치 : 양천구 신월동 987번지(독서근린공원)

3. 사업기간 : 2010.07. ~ 2015.11.

4. 시설규모

- 부지면적 3,980㎡(연면적 8,385.89㎡), 지하 3층(250면), 지상 공원

5. 분기별 예산집행실적 및 계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2013이전	2014	2015				2016이후
					1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	계	14,572	340	1,516	820	4,236	4,600	3,060
	보상비
	건설비	14,572	340	1,516	820	4,236	4,600	3,060
시비	소계	8,743	204	910	492	2,542	2,760	1,835
	보상비
	건설비	8,743	204	910	492	2,542	2,760	1,835
구비	소계	5,829	136	606	328	1,694	1,840	1,225
	보상비
	건설비	5,829	136	606	328	1,694	1,840	1,225

※ 건설비(공사비, 설계비) : 토지 및 건물 등 보상비를 제외한 금액

6. 사업추진현황 (공정률 : 62 %)

추진일자	추 진 상 황	비 고
2014.05.15. 2015.04.30. 2015.05.31. 2015.06.30.	공사 착공(토목) 지하 터파기 공정 완료 지하3층 철근 콘크리트 공정 완료 지하2층 철근 콘크리트 공정 진행	현재 추진 공종 철근, 콘크리트 공정 진행

7. 사업 부진사유 및 대책

- 없음

8. 기타사항 : 없음

2015 . 07 . 01.

작성자 :   담당자   양천구  교통지도과  행정7급  성명 최종철 (인)

확인자 : 담당과장   양천구  교통지도과  행정5급  성명 김영흠 (인)