마곡 도시개발지구내 존치중인

강서구 청소시설 이전 대책회의 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2015.5.14.(목) 14:30

○ 장    소 : 서울시청 서소문청사1동 11층 기후환경본부장실

○ 참 석 자 : 기후환경본부장, 환경에너지기획관,
마곡조성과장, 녹색에너지과장, 강서구 청소자원과장,
집단에너지팀장, 음식폐기물관리팀장,
SH집단에너지사업단 건설실장
※ SH공사 택지개발본부 관계자 불참

○ 논의사항 : 마곡 도시개발지구내 강서구 청소시설 이전대책 등

□ 회의결과

강서구 청소시설 이전대책

○ 강서구청 청소자원과

- 청소시설 이전 대상지인 행주대교 남단, 방화대교 남단 지역의 부지 사용 등 관계기관과의 조속한 협의 진행하여 8월15일까지 이전 추진

- 마곡지구의 공동주택 및 연구시설 등에 대한 차질없는 열공급을 위한  집단에너지 열공급시설 건설공사, 서울화목원 조성공사의 절대기간을 감안하여 청소시설의 적극적인 이전 추진

- 집단에너지 열공급시설 중 1단계 시설의 착공시점인 2015.9월까지 청소시설 이전 불가시는 1단계 시설 공사와 간섭되는 작업자 임시휴게실, 압축기, 투하대를 2단계 시설 공사부지로 이전하여 1단계 시설공사 착공에 차질없도록 적극 협조

○ 마곡조성과

- 강서구에서 계획하고 있는 청소시설 이전 대상지(행주대교 남단 또는 방화대교 남단)으로 조속히 이전 작업이 진행되도록 지원방안 마련

- SH공사 측에 부지 진입로 확보 및 성토작업 등 적극적인 협조 주문

- 강서구청과 SH공사 간의 행정소송이 조기에 마무리될 수 있도록 법률지원담당관과 향후 소송진행방안 협의

○ SH집단에너지사업단

- 집단에너지 열공급시설 중 1단계 시설부지에 존치하고 있는 강서구 청소시설의 2단계 시설 부지로 이전 등 추진시에는 청소시설 기능이 저하되지 않도록 제반 대책 마련 및 추진

폐기물처리시설 등 관련

○ 생활환경과 및 자원순환과

- 광역음식폐기물 처리시설 설치 분담금 관련 이견, 생활쓰레기 감량화 등 문제점 해결을 위하여 강서구와 재협의 추진(진행사항 10일이내 보고)

붙임 1. 이전대책 회의록 및 회의자료 각 1부.

2. 강서구 청소시설 이전 대상지 현황. 1부 끝.