주간 진척보고서				시스템명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
문서번호	R161007	작성자	박성원	작성일	2016/10/07	버 전	1.0

프로젝트명	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	23.19/50.0	6/40.0	5.14/10.0	34.34/100.0
		실적	23.19/50.0	6/40.0	5.14/10.0	34.34/100.0

주요 내용	1. 수치표고모델 재입수(공간정보산업진흥원) 2. 항공사진 DB구축 시작
업무구분	금 주 실 적 (2016.10.04 ~ 2016.10.07)	차 주 계 획 (2016.10.10 ~ 2016.10.14)
사업관리	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크 - 중간보고회 자료 작성
시스템개발	1. 구현 - 촬영회차, 주점/성과 관리 기능 개선 1.1 Tab으로 구분되게 UI개선	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능
D B 구 축	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 원시자료 확인 : 오류 데이터 확인 - 파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 : JPEG2000 변환 작업(60%완료) : 진북방향 확인 및 편집(30%완료) - 주기표시 삭제 : 해상도 10Cm 주기 삭제(30%완료) 2.수치표고모델 재입수(공간정보산업진흥원) - 입수일 : 2016년 10월 5일(수) - 오류 데이터 재수집 : 강남, 서초, 서대문구,종로 중구, 용산 3. 수치표고모델 구축 - 재수집 데이터 자료 분석 및 확인	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 파일 포맷 변환 및 진북방향 확인 및 편집 - 주기표시 삭제 - 해상도 변경(10Cm --> 25Cm)
이슈사항