주간 진척보고서				시스템명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
문서번호	R161021	작성자	박성원	작성일	2016/10/21	버 전	1.0

프로젝트명	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	23.93/50.0	12.54/40.0	6.02/10.0	42.49/100.0
		실적	23.93/50.0	12.54/40.0	6.02/10.0	42.49/100.0

주요 내용	1. 수치표고모델 분석 및 확인(공간정보산업진흥원) 2. 항공사진 DB구축(파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 완료 / 주기표시 삭제 완료 / 해상도 변경 완료)
업무구분	금 주 실 적 (2016.10.17 ~ 2016.10.21)	차 주 계 획 (2016.10.24 ~ 2016.10.28)
사업관리	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크 - 중간보고회 자료 검토 및 수정	1. 사업관리 - 중간보고회 수행 일시 : 2016년 10월 17일 오전 10:00 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층)
시스템개발	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능	1. 구현 - 항공사진 신청 / 승인 알람 기능 테스트 - 시도행정연계 – 방문민원 정보 조회
D B 구 축	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 파일 포맷 변환 및 진북방향 편집 : 진북방향 확인 및 편집 - 주기표시 삭제 : 해상도 10Cm 주기 삭제 - 해상도 변경(10Cm --> 25Cm) - 기무사 보안 처리	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 기무사 보안 처리 2. 수치표고모델 - 공간정보산업진흥원 제공 데이터 재수집 및 분석
이슈사항