주간 진척보고서				시스템명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
문서번호	R160812	작성자	박성원	작성일	2016/08/12	버 전	1.0

프로젝트명	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	5.53/50.0	0.0/40.0	2.51/10.0	8.04/100.0
		실적	5.53/50.0	0.0/40.0	2.51/10.0	8.04/100.0

주요 내용	1. 착수보고회 준비 2. 기본요구사항정리 및 기능목록 도출(개발부문)
업무구분	금 주 실 적 (2016.08.08 ~ 2016.08.12)	차 주 계 획 (2016.08.15 ~ 2016.08.19)
사업관리	1. 착수보고회 수행 일시 : 2016년 8월 8일 10:00 ~ 11:00 장소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층) 참석자 : 총 15명 2. 프로젝트 관리 계획 수립 - 개발/관리 산출물 테일러링 3. 사업관리 - 착수보고회 결과보고서 작성 - 홍보지원 ∎ 리플렛 및 판넬 디자인 시안 제작 ∎ 서울시 소개자료 업데이트	1. 사업관리 - 개발부문 진행상황 체크 - 설계부문 문서화 진행 여부 체크 (인터뷰 결과서, 요구사항기술서, 요구사항정의서) - 정보화사업관리시스템 확인 (산출물 등록 대상 확인 및 산출물 테일러링 비교)
시스템개발	1. 요구사항분석 - 기본요구사항정리 - 사용자 인터뷰 ∎ 건축기획과 김정훈 주무관 - 요구사항 분석 및 정의 - 기능목록도출 2. 설계 - 시스템통합 설계	1. 요구사항분석 - 사용자 인터뷰 2. 설계 - 시스템통합 설계 - 아키텍처 설계
D B 구 축	1. 고도데이터 분석 - 파일 이상 유무 확인 및 에러사항 전달	1. 고도데이터 분석 - 에러 파일 재 취합 및 분석
이슈사항