함께하는 문화가 따뜻한 세상을 만들어 갑니다.
		문화체육관광부
수신	서울특별시장(체육진흥과장)
(경유)
제목	2016년 공공체육시설 개보수 지원 사업계획 변경 승인(서울 동작구민체육센터 개보수)

1. 서울특별시 체육진흥과-7459(2016.8.1.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 2016년 공공체육시설 개보수 지원 사업계획 변경 요청사항에 대하여 다음과 같이 변경 승인하오니 사업추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업명	동작구민 체육센터 시설 개보수	좌 동
사업비	445백만원 (국비 275, 지방비 170)	245백만원 (국비 73.5, 지방비 171.5)
사업규모	ㅇ 수영장 바닥타일 교체 및 환기조화기, 전열교환기 교체 ㅇ 화장실 리모델링 및 주차관제시스템 교체 ㅇ 수영장 조명교체 및 여자탈의실 확장 등	ㅇ 수영장 바닥타일 교체 및 환기조화기, 전열교환기 교체 ㅇ 수영장 조명교체 및 여자탈의실 확장 등
사업기간	2016. 7. ~ 2016. 12.	2016. 9. ? 2016. 12.

나. 변경사유

ㅇ 국비 지원 비율(30%)에 따른 지방비 확보가 어려워 총사업비를 변경함.  끝.

							문화체육관광부장관
주무관										체육진흥과장
협조자
시행			체육진흥과-1460									(	2016.08.03.					)		접수			체육진흥과-7554								(	2016.8.4.					)
우	30119					세종특별자치시 갈매로 388 정부세종청사 15동															/			http://www.mcst.go.kr
전화		044-203-3139						/전송			044-203-3490					/	ss2182@mcst.go.kr												/	대시민공개