전통시장속 작은대학

142-874 서울시 강북구 도봉로 71길 26(수유동) / TEL 02-987-6380 / FAX 02-986-9171

홈페이지 : www.suyumk.com/suyumk  E-mail: hongjy0615@hanmail.net/ 담당 : 홍주연 실장

수 유 재 래 시 장

문서번호 : 20161117 시행일자 : 2016 년 11 월 17 일 수 신 : 강북구청 지역경제과 참 조 :배 태 수 주무관님	선 결			지시
	접수	일자
		시간		결재 ․ 공람
		번호
	처리과
	담당자
	심사자			심사일
■ 제 목 : 수유재래시장 누수공사 계획변경 건

1. 귀 단체의 무궁한 발전과 건승을 기원하오며 항상 수유재래시장의 많은

관심과 격려를 가져주심에 감사드립니다.

2. 다름이 아니오라 “수유재래시장 누수공사 계획변경”관련내용을

보내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

수유재래시장 누수 공사를 함에 있어 당초 지붕 빗물받이 보수 공사계획

빗물받이 내 아스팔트 시트 방수 공사를 매장 상부(내부처마) 부위 누수가

발생되어 영업행위 불가로 인한 민원 제기가 있어 민원 해소 차원에서 우수

빗물 유도 공법으로 변경하여 주시고 (샘플시공 사진참조)

또한 지붕 단면공사 각 파이프 보강 및 철판 교체 작업을 실시하려 하였으나

지붕 부위 철판 및 각 파이프 보강 시공 시 영업 정지로 인한 민원발생(공사 소요기간 7일)

공법 변경(아스팔트시트공사 → 빗물 유도공법) 에 따른 공사비 부족으로 부분 보수 공사

대처 필요

해당 부위 현장 확인 결과 부분 공사 시 누수 부위 해결가능

철판 위 철판 덧댐 작업

선홈통부위 전체 우레탄 방수 작업

우수 유도 홈통 설치

이렇게 변경하고자 하오니 구청의 재가를 바랍니다.

수 유 재 래 시 장