등록번호	도로시설과-18407		도로굴착팀장		도로시설과장			안전건설국장
등록일자	2016.12.14.
결재일자	2016.12.15.
공개구분	대시민공개
			협조
『2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가) 설계변경(1차:최종) 검토 보고
안전건설국 도로시설과

『2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)

설계변경(1차:최종) 검토 보고

『2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)』 관련

하여 도로굴착복구공사 시공물량의 증가에 따라 건설폐기물량 증가

되어 이에 따른 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ		공사 현황

□ 공 사 명 : 2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)

□ 공사기간 : 2016. 04. 7 ~ 2016. 12. 31

□ 공사개요 : 폐기물처리 및 운반  4,004톤

□ 계약금액 : 87,766천원

□ 계약업체 : 태성용아개발(주) 대표 윤영석

동아공사(주) 대표 박종기

□ 설계변경 사유 : 본 공사인 도로굴착복구공사의 시공물량 증가에 따른

건설폐기물량 증가에 의한 변경사항 반영

□ 변경 내용

공 종	단위	당초	변경	증 ․ 감	비고
건설폐기물 처리	톤	3,000	4,004	증)1,004
건설폐기물 운반	톤	3,000	4,004	증)1,004

□ 용역비 현황                                             (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감액		비 고
			증	감
총용역비	87,766,000	121,539,000	33,773,000
도 급 비	87,766,000	121,539,000	33,773,000

□ 조치의견

○ 위와 같은 내용으로 사업 시행에 따른 폐기물량 증가에 대한 설계변경(1차 : 최종)을 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.  끝.