2016년 교량시설물 도로사업소별 보수・보강 사업계획

사업소명	사업명	사업개요	2016년 예산(천원)	추진실적	향후계획
계		총 10건	9,369,378
동부도로 사업소 (시설보수과)	탄천교 보수공사	∘ 위치 : 강남구 일원동 833번지 ∘ 내용 : 교면방수 및 포장 70a ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 910백만원	910,000	∘ ‘14년 : 탄천교 정밀점검 용역 시행	∘ ‘16.1 ~ 2월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.3월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공
서부도로 사업소 (시설보수과)	사천교 성능개선	∘ 위치 : 서대문구 연희동 ~ 서대문구 남가좌동 ∘ 내용 : 기존구조물 철거 및 재설치 900㎡ (폭 10m, 연장 90m) ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2017. 6 ∘ 총사업비 : 5,300백만원	1,000,000	∘ ‘15. 1~12월 : 사천교 확장 기본 및 실시설계 실시(성능개선 포함) ∘ ‘15.4 ~ 5월 : 정밀안전진단 실시 ∘ ‘15.9월 : 투자심사	∘ ‘16.1 ~ 2월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.3월 : 공사계약 및 착공 - 확장공사 후 성능개선 시행 ∘ ‘17.6월 : 공사 준공
	현저고가 보수공사	∘ 위치 : 서대문구 현저동 107 ∘ 내용 : 교면포장 및 방수 25a, 상판치환 1,278㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 1,940백만원	1,940,000	∘ ‘14.2월 : 현저고가 정밀점검용역 준공	∘ ‘16.1 ~ 3월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.4월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공
	삼각지고가 보수공사	∘ 위치 : 용산구 한강로1가 ∘ 내용 : 받침장치 교체 60개소, 단면보수 627㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 10 ∘ 사업비 : 797백만원	797,000	∘ ‘15.2월 : 삼각지고가 정밀안전진단용역 준공	∘ ‘16.1 ~ 3월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.4월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.10월 : 공사 준공
남부도로 사업소 (시설보수과)	도림고가 보수공사	∘ 위치 : 영등포구 문래동 36 ∘ 내용 : 교면포장(방수) 56a, 브라켓보강 10기 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 1,126백만원	1,126,128	∘ ‘14년 : 도림고가 정밀점검용역 시행	∘ ‘16.1 ~ 2월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.3월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공
	노들남고가 보수공사	∘ 위치 : 동작구 본동 159번지 ∘ 내용 : 구체강화 2,936㎡, 단면보수 66㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 460백만원	460,000	∘ ‘15년 : 노들남고가 정밀점검용역 시행	∘ ‘16.1 ~ 2월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.3월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공
북부도로 사업소 (시설보수과)	길음교 보수공사	∘ 위치 : 성북구 돈암동 26-2 ∘ 내용 : LMC포장 1,575㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 10 ∘ 사업비 : 1,106백만원	1,106,250	∘ ‘15년 : 길음교 정밀점검 시행	∘ ‘16.1 ~ 3월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.4월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.10월 : 공사 준공
	청계천교량 강구조물 도장공사	∘ 위치 : 종로5가 ~ 중구 청계천상 교량 (새벽다리, 나래교, 맑은내다리, 다산교) ∘ 내용 : 방식도장 1,300㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 1,000백만원	1,000,000	∘ ‘14년~’15년 : 정밀점검 시행	∘ ‘16.1 ~ 3월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.4월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공
성동도로 사업소 (시설보수과)	청량제1고가 성능개선	∘ 위치 : 동대문구 휘경동 343 ~ 전농동 113 ∘ 내용 : 기존 PSC-Beam 철거 및 PF교 신설 ∘ 기간 : 2014. 12 ~ 2016. 6 ∘ 총사업비 : 3,580백만원	500,000	∘ ‘14년 : 실시설계용역 시행 ∘ ‘14.12월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘14.12월~’15.7월 : 유관기관 협의 및 지장물 이설 ∘ ‘15.8~12월 : 고가 1/2 철거 및 신설	∘ ‘16.1~6월 : 공사시행 및 준공 - 고가 나머지구간(1/2) 철거 및 신설
강서도로 사업소 (시설보수과)	개봉철도고가 보수공사	∘ 위치 : 구로구 개봉동 235 ∘ 내용 : 교면방수 및 포장 28a, 단면보수 460㎡ 등 ∘ 기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12 ∘ 사업비 : 530백만원	530,000	∘ ‘14년 : 개봉철도고가 정밀점검용역 시행	∘ ‘16.1 ~ 2월 : 계약심사 및 발주 ∘ ‘16.3월 : 공사계약 및 착공 ∘ ‘16.12월 : 공사 준공