2016년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(강동수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 9,600m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	9,690	7,684	4	8,590	6,804	1,100	880
송파구	4,940	3,884	2	4,460	3,500	480	384
강동구	4,750	3,800	2	4,130	3,304	620	496

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 4건		150～300	8,590	6,804
1	풍납동172외 4개소 배급수관정비공사	150~300	2,200	1,650	송파구
2	가락동 154번지외 3개소 배급수관정비공사	150~300	2,260	1,850
3	암사동548~496-26외 8개소 배급수관정비공사	150~300	1,770	1,416	강동구
4	천호동409-6~157-3 외 7개소 배급수관정비공사	150~300	2,360	1,888

- 사업물량 산출근거(송파구)

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		4,460	150～300
광암13	풍납동 172-5~166-5	220	150	CIP (세척갱생관)	1982(91)	누수발생1
광암14	잠실동 84~ 86	740	300	CIP (세척갱생관)	1984(92)	세척갱생
광암16	잠실동 305-17~302-6	400	200	CIP (세척갱생관)	1984(92)	누수발생1
광암16	잠실동 335~341-26	400	300	CIP	1984	누수발생2
광암23	삼전동 130-14~133-12	440	150	CIP (세척갱생관)	1982(92)	누수발생4
오금 7	가락동 154-18~138-1	730	150~200	CIP (세척갱생관)	1980(92) 1982(92)	누수발생3
오금10	가락2동 1~ 문정초교 교차로	380	300	CIP	1983	노후관
오금16	거여동136-43~173-17	430	300	CIP (세척갱생관)	1981(92)	누수발생1
광암9,10	풍납동 388 ~ 402-4	720	150	CIP (세척갱생관)	1984(93)	세척갱생

- 사업물량 산출근거(강동구)

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		4,130	150～300
길동14	암사동 501-3~496-26	140	300	CIP (세척갱생관)	1984(91)	시범사업지역
길동14	암사동 491-37~ 499-13	350	300	CIP (세척갱생관)	1984(91)	시범사업지역
길동27	상일동 162~131	310	300	CIP (세척갱생관)	1982(93)	세척갱생
길동33	상일동 473~458-2	240	200	CIP (세척갱생관)	1982(93)	세척갱생

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
길동32	상일동 187	220	300	CIP (세척갱생관)	1982(93)	녹물출수
길동10	고덕동 142~151-4	110	200	CIP (세척갱생관)	1982(92)	녹물출수
길동60	길동 399-3~396-10	200	200	CIP (세척갱생관)	1980(90)	누수발생2
길동41	천호동 359~359-23	110	100	SP	1985	녹물출수
길동38	천호동 337-118~337-14	90	80	SP	1985	녹물출수
길동47	천호동 409-6~157-3	725	200	CIP (세척갱생관)	1980(87)	누수발생 1
광암67	성내동112-69~111-23	165	300	CIP (무라이닝관)	1985	세척갱생
광암72	성내동 320-7~595	270	150	CIP (세척갱생관)	1984(90)	세척갱생
광암68	성내동291-19~226-12	330	300	CIP (세척갱생관)	1984(91)	세척갱생
광암75	성내동 427~428-5	230	150	CIP (무라이닝관)	1986	누수발생 1
길동14	둔촌동 600-8~602-10	140	300	CIP (무라이닝관)	1985	누수발생 1
길동14	둔촌동 81-5~44-4	200	250	CIP (세척갱생관)	1984(91)	세척갱생
길동14	둔촌동94-3~6-2	300	150	CIP (무라이닝관)	1985	녹물출수

- 연간단가 시행 계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 3 건		100~200	1,100	880
1	석촌동외11개동 상수도공사	100	330	244	송파구
2	마천동외13개동 상수도공사	100	150	140
3	천호1동외17개동 상수도공사	200	620	496	강동구

- 사업물량 산출근거

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	강동구	620	200
광암 67	성내동49-1~12-25	340	200	CIP (세척갱생)	1984(87)	세척갱생
길동 47	천호동409-6~458-15	280	200	CIP (세척갱생)	1969(89)	세척갱생
소 계	송파구	480	100
광암 17	잠실본동 244-12~244-13	160	100	CIP (세척갱생)	1984(92)	누수발생 1
광암 17	잠실본동 243-11~243-6	170	100	CIP (세척갱생)	1984(92)	누수발생 1
광암 35	방이동 155~155-11	150	100	CIP	1986	누수발생 1

끝.