문서번호	백제학연구소-381
결재일자	2016.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		백제학연구소장	한성백제박물관장
협 조
	총무과장
	유물과학과장

2016년 삼성동토성 추정지 발굴(시굴)조사 계획

2016. 3.

한성백제박물관

(백제학연구소)

2016년 삼성동토성 추정지 발굴(시굴)조사 계획

삼성동토성 추정지에 대한 발굴(시굴)조사를 통해 토성의 존재여부 및 성격을 파악하여 한성백제의 도성구조와 도성 방어체계에 대한 기초자료를 확보하고자 함

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 삼성동토성 추정지 발굴(시굴)조사

❍ 기간 : 2016. 3. ~ 2016. 8.

❍ 조사지역 : 삼성동토성 추정지 일원(강남구 삼성동)

- 봉은사 및 경기고교 일대

- 82-수 청담배수지 공원 일원

❍ 조사면적 : 450㎡

❍ 사업내용

- 삼성동토성 추정지 발굴(시굴)조사(유구확인조사·실측·사진기록 등)

- 발굴 유물·유구의 성격·편년·보존대책 등에 대한 학술자문회의 개최

- 발굴자료의 정리 및 발굴조사보고서 간행

❍ 소요예산 : 70,000천원

Ⅱ		추진 근거

❍ 한성백제박물관 발굴조사기관 등록(2013. 6. 3.)

❍ 백제학연구소 설치계획

(서울특별시장방침, 한성백제박물관총무과 – 제7321호, 2013. 6. 21.)

❍ 2016 백제왕도유적 발굴조사 계획

(백제학연구소 – 제21호, 2016. 1. 14.)

Ⅲ		추진 경위

❍ 삼성동토성 추정지(경기고교) 현장조사 및 전문가 자문의견 수렴(2014.02.23.)

❍ 삼성동토성 추정지 시굴조사 관련 전문가 자문의견 수렴(2015.11.04.)

❍ 삼성동토성 일대 지형·지리 분석 관련 삼성동토성 위치 추정지       전문가 현장점검(2015.11.13.)

❍ 삼성동토성 추정지 일대 발굴을 위한 기초조사용역(삼성동토성 추       정지 및 주변지역의 고지형 분석) 착수보고(2015.12.15.)

❍ 삼성동토성 추정지 일대 발굴을 위한 기초조사용역(삼성동토성 추정지         및 주변지역의 고지형 분석) 최종보고 및 현장조사 결과보고(2016.03.04.)

Ⅳ		세부추진계획

□ 추진방향

❍ 조사대상지역에 대한 정밀 현황 측량 실시

❍ 삼성동토성 추정지 일대에 대한 고지형분석 및 정밀 현황측량 결과를

바탕으로 시굴트렌치 조사지점 선정

❍ 시굴트렌치 조사의 제토 깊이는 문화층까지 실시하며, 문화층 및 토성

관련 유구가 확인되지 않을 시에는 기반토까지 제토하는 것을 원칙으로

하여 조사 진행

❍ 조사된 유구 및 유물의 성격, 편년, 보존대책 등에 대해서는 학술자문회의

개최, 의견수렴 및 추진

❍ 발굴(시굴)조사 보고서는 발굴조사 완료 후 2년 이내에 발간

❍ 이외 발굴조사 관련된 사항은 관계법령에 따라 문화재청과 협의하여 처리

□ 조사단의 구성

- 조사  단장 : 이인숙(한성백제박물관장)

- 자문  위원 : 관련 전문가 5명 내외

- 조사  위원 : 김지연(한성백제박물관 백제학연구소장)

김기섭(한성백제박물관 전시기획과장)

- 책임조사원 : 박중균(한성백제박물관 백제학연구소 발굴조사팀장)

- 조  사  원 : 이혁희(한성백제박물관 학예연구사)

- 보  조  원 : 이용범(한성백제박물관 연구원)

※ 조사 추이에 따라 자문위원 및 조사단은 변동될 수 있음

□ 추진일정

❍ 2016. 03~04

- 2016년 삼성동토성 발굴(시굴)조사계획 수립

- 서울시 역사문화재과 시굴조사비 예산 재배정 요청

- 발굴조사계획서 작성 및 발굴(시굴)조사 허가 신청

❍ 2016. 05~06

- 삼성동토성 추정지 조사지역 정밀 현황측량 용역 실시

- 발굴(시굴)조사 착수 및 진행, 학술자문회의 개최

- 발굴자료(유물·도면, 사진) 정리

❍ 2016. 07~08

- 발굴(시굴)조사 완료 및 완료관련서류(완료약보고서, 출토유물현황 등)         작성·제출

□ 현장관리계획

❍ 현장조사는 조사원인 학예연구사의 입회하에 오전 8시부터 오후 5시

까지 실시(월~금)

❍ 작업인부와 굴삭기 기사의 수기 사인으로 출근 점검 및 주1회 안전교육 실시

❍ 회의 등으로 조사원의 현장 부재중에는 연구원 및 인력공급 업체의 현장대리인

이 현장 안전 및 인력관리

❍ 작업현황 및 장비운용 내용을 명시한 주간업무보고는 일지 작성하여 1주 단위로

박물관장 결재 시행

Ⅴ		소요예산

□ 예산내역

❍ 예산금액 : 70,000천원

❍ 예산과목 : 서울시 역사문화재과 한성백제유적 유네스코 세계유산 등재추진, 사무관리비(100-201-01)

※역사문화재과 예산에서 70,000천원 재배정, 한성백제박물관에서 집행

□ 예산집행

구분	내용	소요예산 (천원)	예산과목	집행방법
발굴조사	-제토 및 원상복구 현장인부 용역비	18,600	사무관리비	수의계약
	-조사재료 구입 -측량·항공촬영비 -과학분석비 -학술자문위원회 진행 -발굴(시굴)보고서 간행 등	51,400	사무관리비	일상경비 교부 후 지출/일반지출
계		70,000

Ⅶ		행정사항

❍ 출토유물 보존처리 및 임시보관유물 수장고 격납(유물과학과)

❍ 발굴 관련 용역 계약 진행(총무과). 끝.

□ 참고자료 1

❍ 2016년 삼성동토성 추정지 발굴(시굴)조사지역 위치도

□ 참고자료 2

❍ 2016년 삼성동토성 추정지 시굴조사 트렌치 배치도 1(Ⅰ지구 A구역)

□ 참고자료 3

❍ 2016년 삼성동토성 추정지 시굴조사 트렌치 배치도 2(Ⅰ지구 B구역)

□ 참고자료 4

❍ 2016년 삼성동토성 추정지 시굴조사 트렌치 배치도 3(Ⅱ지구)